ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2021 г. N 878

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 9 ИЮНЯ 2015 Г. N 570

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г. N 570 "Об утверждении федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2021 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 25, ст. 3654; 2016, N 24, ст. 3525; 2018, N 12, ст. 1682; N 47, ст. 7269; 2019, N 50, ст. 7375; 2021, N 1, ст. 156).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 2021 г. N 878

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ИЮНЯ 2015 Г. N 570

1. В наименовании и пункте 1 цифры "2021" заменить цифрами "2023".
2. Федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2021 года", утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 2015 г. N 570
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 9 июня 2021 г. N 878)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА"

ПАСПОРТ
федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

Наименование Программы	-	федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года"	
Дата принятия решения о разработке Программы	-	распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2014 г. N 2563-р	
Государственный заказчик - координатор Программы	-	Министерство экономического развития Российской Федерации	
Государственные заказчики Программы	-	Министерство экономического развития Российской Федерации,
Федеральное дорожное агентство	
Основные разработчики Программы	-	Министерство экономического развития Российской Федерации,
Правительство Республики Карелия	
Цели и задачи Программы	-	целями Программы являются развитие экономического потенциала Республики Карелия и его реализация.
Задачами Программы на 2016 - 2023 годы являются:
повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики;
инфраструктурное обеспечение экономического развития;
развитие социальной сферы	
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	-	инвестиции в основной капитал (по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах);
уровень общей безработицы;
доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы;
число созданных рабочих мест;
количество созданных промышленных площадок;
протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Карелия;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия;
количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений;
количество реконструированных объектов опорной сети автостанций Республики Карелия;
количество реконструированных и приобретенных пожарных депо на территории Республики Карелия;
количество семей, имеющих 3 и более детей, которым предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках Программы;
количество построенных и реконструированных объектов в сфере здравоохранения;
созданная площадь под размещение государственных объектов здравоохранения;
количество реконструированных объектов в сфере культуры, в том числе с целью приспособления к современному использованию;
количество мест, созданных в дошкольных образовательных организациях;
количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
количество построенных и реконструированных объектов инфраструктуры физической культуры и спорта;
количество построенных зданий аэровокзальных комплексов	
Сроки и этапы реализации Программы	-	Программа реализуется в 2 этапа:
I этап - 2016 - 2017 годы;
II этап - 2018 - 2023 годы	
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы на 2016 - 2023 годы составляет 91431,2919 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 16207,0543 млн. рублей;
консолидированный бюджет Республики Карелия - 1977,4399 млн. рублей;
внебюджетные источники - 73246,7977 млн. рублей	
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	-	улучшение в Республике Карелия инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортно ориентированных и импортозамещающих производств, повышению конкурентоспособности Республики Карелия в Северо-Западном федеральном округе за счет устранения инфраструктурных ограничений экономического развития;
основные показатели социально-экономической эффективности (по отношению к уровню 2015 года):
прирост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах - в 1,23 раза;
снижение уровня общей безработицы на 1,5 процентного пункта	

I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

1. Анализ социально-экономического положения
Республики Карелия

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" определены такие национальные цели развития Российской Федерации, как сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.
В рамках достижения данных национальных целей развития необходимо в том числе достижение таких целевых показателей, как:
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов;
улучшение качества городской среды в полтора раза, обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов;
реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;
реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.
Республика Карелия, являясь приграничным периферийным регионом, имеет важное стратегическое значение для Российской Федерации с точки зрения обеспечения национальной безопасности. По ее территории проходит самая протяженная граница с Европейским союзом - почти 800 километров.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года" одним из принципов в рамках государственной политики регионального развития являются соблюдение баланса между наращиванием экономического потенциала регионов и сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения, обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение уровня конкурентоспособности их экономики на международных рынках.
Сбалансированное территориальное развитие Российской Федерации предусматривает создание условий, позволяющих региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона.
Такая задача приобретает особую актуальность для Республики Карелия, так как отсутствие действенных мер экономического стимулирования в перспективе неизбежно приведет к прогрессирующему отставанию показателей региона относительно средних показателей по Российской Федерации.
На протяжении последних десятилетий уровень социально-экономического развития Республики Карелия характеризуется отставанием как от среднероссийского уровня, так и от уровня Северо-Западного федерального округа. Так, показатель валового регионального продукта на душу населения по итогам 2016 года составил 78 процентов среднероссийского показателя и 66 процентов такого показателя по Северо-Западному федеральному округу. Несмотря на то, что по этому показателю Республика Карелия переместилась на 30-е место в Российской Федерации, разрыв между показателями сохраняется. В 2019 году среднедушевое значение валового регионального продукта по Республике почти на 20 процентов ниже среднероссийского уровня и на 30 процентов - среднего показателя по Северо-Западному федеральному округу. Такое отставание во многом связано с низким уровнем инвестирования.
По итогам 2016 года в Республике Карелия показатель, характеризующий объем инвестиций в основной капитал на душу населения, в 1,8 раза ниже среднероссийского показателя и в 2,3 раза ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе. По итогам 2019 года указанный показатель в Республике в 1,6 раза ниже среднероссийского показателя и в 1,9 раза ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе.
Кроме этого, в регионе отмечается высокий уровень безработицы.
По итогам 2019 года число безработных по отношению к экономически активному населению, определенное по методологии Международной организации труда, в Республике Карелия составило 9,2 процента при среднероссийском показателе 5,5 процента. По итогам 2019 года превышение среднероссийского уровня общей безработицы сохранилось. Так, среднее значение данного показателя в целом по Российской Федерации снизилось до 4,6 процента, в Республике - до 7,4 процента.
В свою очередь, это влияет на отток населения в регионе - 16 человек на 10 тыс. человек населения, тогда как в Северо-Западном федеральном округе прирост (приток населения) по этому показателю достиг 40,5 человека на 10 тыс. человек населения, а в Российской Федерации - 17,9 человека на 10 тыс. человек населения.
По итогам 2019 года миграционная убыль в регионе составила 11,5 человека на 10 тыс. человек (в Северо-Западном федеральном округе - прирост 39,3 человека на 10 тыс. населения, по Российской Федерации - 19,39 человека на 10 тыс. населения).
Несмотря на негативные тенденции, Республика Карелия в настоящее время продолжает играть значимую роль в ряде секторов экономики Российской Федерации. При доле 0,4 процента численности населения Республики Карелия в общей численности населения Российской Федерации Республика по производству ряда важнейших видов продукции обеспечивает значительный стратегический вклад в экономику Российской Федерации. В Республике Карелия выращивается около 70 процентов всей российской форели, производится 20 процентов железорудных окатышей, 42 процента газетной бумаги, 22 процента бумаги, 15 процентов целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов, а также 10 процентов щепы технологической для производства целлюлозы и древесной массы.
Республика Карелия обладает уникальным опытом международного сотрудничества в самых разных областях. На территории Республики Карелия в 70 - 80-х годах XX века реализован крупнейший международный проект, связанный с созданием крупного предприятия и города, - строительство Костомукшского горно-обогатительного комбината и г. Костомукши. Республика Карелия активно участвует в сотрудничестве с регионами государств - членов Европейского союза и Норвегии, в том числе при реализации совместных проектов в рамках программ приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза, Норвежского Баренцева секретариата. В числе первых на внешней границе Российской Федерации с Европейским союзом создан еврорегион "Карелия". Этот опыт востребован для Российской Федерации и сопредельных государств в контексте углубления процессов евразийской экономической интеграции, а также развития партнерских отношений с Европейским союзом.
Медленный и сложный переход национальной и региональной экономики на инновационный путь развития создает риски сохранения отставания экономики Республики Карелия от экономики граничащих с ней территорий Европейского союза и угрозу национальной безопасности.
Решение проблемы социально-экономической стабильности предполагается осуществить с помощью федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" (далее - Программа).
Для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации Республика Карелия сосредоточивает свои усилия и ресурсы на решении острых проблем по следующим направлениям:
инфраструктурное обеспечение экономического развития региона;
экономический рост, который достигается прежде всего путем развития действующих и создания новых производств;
совершенствование государственно-частного партнерства;
рациональное природопользование, обеспечиваемое за счет сбалансированного потребления и развития прогрессивных технологий;
стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного участия Российской Федерации и Республики Карелия в развитии системы международного разделения труда;
повышение качества жизни граждан.
Для выбора вариантов решения указанных проблем были рассмотрены и проанализированы 2 сценария формирования и реализации Программы исходя из степени приоритетности решения стоящих перед Республикой Карелия задач, выбора перечня мероприятий Программы и привлекаемых дополнительных финансовых ресурсов для их реализации.
Выбор варианта решения проблемы осуществлялся с учетом возможности расходования бюджетных средств и достигаемых целевых показателей, характеризующих результаты реализации Программы.
Первый сценарий предусматривает продолжение инвестирования ранее начатых проектов в реальном секторе экономики, реализацию наиболее важных мероприятий по развитию инфраструктуры, создание и модернизацию ряда производств, обеспечивающих прирост налогооблагаемой базы и создание высокопроизводительных рабочих мест.
В результате реализации указанного комплекса мероприятий предусматривается частичное снятие инфраструктурных ограничений экономического роста.
Развитие Республики Карелия в рамках первого сценария позволит обеспечить модернизацию и диверсификацию экономической сферы и улучшить ситуацию на рынке труда.
Объем финансового обеспечения мероприятий Программы в рамках первого сценария составляет 91,4 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 16,2 млрд. рублей.
Первый сценарий позволит минимизировать использование бюджетных средств для достижения предусмотренных результатов реализации Программы.
Второй сценарий помимо проектов, предусмотренных первым сценарием, предполагает создание дополнительных производств и реализацию проектов по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.
При использовании второго сценария с учетом привлечения дополнительных средств объем финансового обеспечения мероприятий составит 228,7 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 26 млрд. рублей.
При этом на реализацию проектов экономического развития предусматривается привлечение средств внебюджетных источников в общем объеме 200,7 млрд. рублей.
Прирост поступлений в федеральный бюджет (нарастающим итогом) превысит затраты, предусмотренные на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета, к 2024 году.
Программа рассматривается как условие привлечения дополнительных частных инвестиций и как государственная гарантия реализации заявленных проектов. При этом ожидается, что приоритет бюджетного финансирования проектов по развитию инфраструктуры обеспечит развитие реального сектора экономики.
Вместе с тем риски реализации второго сценария связаны с тем, что значительные средства на реализацию мероприятий Программы предусматриваются из внебюджетных источников. В условиях неопределенности геополитической обстановки и введения санкций со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Америки возможны ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов, участвующих в указанных мероприятиях, и, следовательно, сокращение планируемого финансирования. Ожидаемый риск также связан с возможным сохранением значительной доли безработицы и низких темпов экономического развития.
Таким образом, наиболее предпочтительным является первый сценарий решения проблем развития Республики Карелия, предусматривающий выделение средств федерального бюджета в размере 16207,0543 млн. рублей. Программа нацелена на решение наиболее острых проблем в сфере экономического развития Республики Карелия. Реализация мероприятий Программы позволит создать в Республике Карелия условия для обеспечения конкурентоспособности региональных предприятий в традиционных и новых секторах специализации, связанных с разработкой и углубленной переработкой природных ресурсов, оказанием услуг на основе инновационных технологий, обозначить новые точки экономического роста и сократить отток молодежи.

2. Основные риски, сдерживающие факторы и конкурентные
преимущества Республики Карелия

В качестве ключевых сдерживающих факторов социально-экономического развития региона определяются:
монопрофильная отраслевая структура экономики с незначительным количеством эффективно работающих предприятий, высокая доля продукции с низкой добавленной стоимостью (в том числе во внешней торговле) в общем объеме продукции, значительное количество (11) монопрофильных населенных пунктов;
неравномерность размещения имеющегося природно-ресурсного, производственного, туристско-рекреационного, транзитно-транспортного, трудового и социального потенциалов территорий;
значительные территориальные диспропорции в уровне и качестве жизни населения;
ограниченная конкурентоспособность промышленного комплекса с ориентацией на использование преимуществ экспортно-сырьевой сферы, высокая ресурсоемкость большинства используемых технологий;
высокий физический и моральный износ основных фондов, медленные темпы технической и технологической модернизации;
недостаточно и неравномерно развитая транспортная инфраструктура;
высокие издержки производства в условиях северной экономики - высокая энергоемкость, крайне низкий уровень газификации Республики Карелия - 8,94 процента (в среднем по Российской Федерации - 71,4 процента);
недостаточная развитость механизмов государственно-частного партнерства;
отток высококвалифицированных кадров в другие регионы Российской Федерации, естественная убыль населения, дисбаланс структуры трудовых ресурсов и низкая заработная плата;
недостаток высокотехнологичных рабочих мест.
Перспективное развитие региона может быть связано со следующими рисками:
конкуренция со стороны соседних регионов Российской Федерации и регионов стран Европейского союза;
волатильность курса рубля по отношению к ведущим валютам и девальвация рубля;
риск зависимости от импорта иностранного оборудования и привозного сырья (энергии);
риск экспортной зависимости;
кризис современной системы международных отношений и дальнейшая изоляция Российской Федерации (в том числе от финансовых инструментов и инвестиционных программ);
увеличение дифференциации между уровнями социально-экономического развития отдельных муниципальных образований Республики Карелия;
усиление противоречий между функциями рекреационного региона и процессами развития промышленного, аграрного и транспортного секторов.
Анализ социально-экономического развития Республики Карелия позволяет выделить ряд следующих конкурентных преимуществ и ключевых факторов развития региона:
богатый природно-ресурсный потенциал - сырьевые ресурсы (железная руда, древесина, торф, щепа), водные ресурсы, туристско-рекреационный потенциал (санаторно-курортные зоны, заповедники, национальные парки), уникальный природно-ландшафтный комплекс;
выгодное экономико-географическое положение - приграничное положение, транзитный потенциал (транзитное железнодорожное и автомобильное сообщение, международные автомобильные пункты пропуска и пункты упрощенного пропуска, приграничная инфраструктура, водный коридор - Беломорско-Балтийский канал);
развитые торгово-экономические и производственные связи с гг. Москвой и Санкт-Петербургом, субъектами Российской Федерации, Республикой Белоруссия, со скандинавскими странами, в том числе с их регионами, положительный опыт реализации программ приграничного сотрудничества (включая инфраструктурную и инвестиционную составляющие) и высокая внешнеторговая активность;
развитый научно-образовательный комплекс и научный потенциал (федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет", Карельский научный центр Российской академии наук, филиалы российских вузов, средние специальные учебные заведения) и высокий уровень образования населения;
широкое распространение и применение информационно-коммуникационных технологий, в том числе в сфере управления;
активная гражданская позиция населения и готовность к диалогу представителей общественных организаций и бизнес-структур с Правительством Республики Карелия;
наличие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и поддержки инвесторов (бизнес-инкубатор Республики Карелия, студенческий бизнес-инкубатор, информационно-технологический парк федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет", открытое акционерное общество "Корпорация развития Республики Карелия", Инвестиционный фонд Республики Карелия, Торгово-промышленная палата Республики Карелия, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия);
благоприятное состояние окружающей природной среды;
благоприятные межнациональные и межконфессиональные отношения и поддержание общественного порядка.
В условиях меняющихся рыночных тенденций Республика Карелия как часть геоэкономического пространства оказалась перед системными вызовами, которые обусловлены экономической глобализацией и интеграцией и во многом характерны для других российских регионов.
Главный вызов связан со вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, в связи с чем перед Республикой Карелия ставится задача в довольно сжатый переходный период обеспечить конкурентоспособность базовых отраслей экономики и встраивание экономики Республики Карелия в мировую экономическую систему. В первую очередь это касается предприятий так называемых чувствительных отраслей, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости, в частности машиностроения, а также организаций сельского хозяйства. В условиях усиления конкуренции с соседними регионами необходимы более активное использование инструментов приграничного сотрудничества и создание благоприятной среды для привлечения инвестиций, в том числе иностранных. Приграничное положение Республики Карелия в настоящее время не обеспечивает достаточного объема зарубежных инвестиций, которые на территории Северо-Западного федерального округа в основном направляются в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Для того чтобы адекватно противостоять современным вызовам, требуется решение комплекса проблем системного и отраслевого характера.
Сдерживающими факторами экономического развития Республики Карелия являются ограниченные возможности бюджетного финансирования мероприятий по модернизации экономики, поскольку 63,2 процента общей суммы расходов консолидированного бюджета Республики Карелия по итогам 2020 года приходилось на первоочередные социально значимые расходы.
Финансовое состояние Республики Карелия осложняется тем, что крупные предприятия, работающие на ее территории, являются структурными подразделениями корпораций, расположенных за пределами Республики Карелия. При этом финансовые показатели структурных подразделений зависят от политики головных организаций.
К основным проблемам функционирования экономики Республики Карелия следует отнести дефицитность энергетического баланса, высокую зависимость от привозных видов топлива и цен на них. Потребность в энергоресурсах, особенно в электрической энергии, только на 45 - 50 процентов покрывается за счет выработки электрической энергии на территории Республики Карелия.
Проведение модернизации и структурной диверсификации экономики региона требует внедрения передовых инновационных технологий. Вместе с тем в регионе существуют проблемы инновационного и технологического развития, к которым относятся дефицит у предприятий собственных средств на инновации, неразвитость инновационной инфраструктуры, недостаточное взаимодействие между наукой и бизнесом, неразвитость системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для инновационной сферы.
Кроме общих системных проблем, существуют проблемы в отдельных отраслях экономики Республики Карелия (лесопромышленном, агропромышленном комплексах), отсутствует развитая дорожная и транспортная инфраструктура.
Одним из сдерживающих факторов развития Республики Карелия также является недостаточно развитая материально-техническая база пожарно-спасательных сил Республики Карелия, в том числе состояние зданий пожарных депо, 54 процента которых располагаются в приспособленных зданиях постройки первой половины прошлого столетия.
Вследствие оттока населения происходит снижение количества и качества трудовых ресурсов, что является существенным ограничением для реализации инновационного сценария развития Республики Карелия.
Недостаток бюджетных средств и отсутствие квалифицированного кадрового обеспечения не позволяют обеспечить благоприятные условия для привлечения инвестиций на территорию Республики Карелия и создать новые рабочие места.
Указанные факторы снижают инвестиционную привлекательность Республики Карелия и степень ее конкурентоспособности как внутри Российской Федерации, так и на мировом уровне.

3. Обоснование необходимости использования
программно-целевого метода

Усугубление негативных тенденций в Республике Карелия связано прежде всего с тем, что основой ее экономики является промышленность, представленная в основном градообразующими предприятиями с изношенными и морально устаревшими основными фондами, работающими в секторах традиционной специализации (лесопромышленном, горнопромышленном комплексах) и определяющими экономический и бюджетный потенциалы территории.
Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры в регионе является еще одним из сдерживающих факторов развития экономического потенциала Республики Карелия. Доля автомобильных дорог регионального значения на территории Республики Карелия, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования на территории Республики Карелия составляет 63,84 процента. Такой показатель на 8,74 процентных пункта выше средней величины этого показателя по Российской Федерации.
На опорной сети автомобильных дорог, обеспечивающих транспортную связь от федеральных трасс к городам Республики Карелия, границе с Финляндской Республикой и соседним субъектам Российской Федерации, имеются участки, состояние которых препятствует полноценному развитию экономики, в том числе увеличению грузопотоков и использованию туристского потенциала Республики Карелия в полном объеме. Кроме того, из 496 автомобильных дорожных мостов, расположенных на дорожной сети регионального значения на территории Республики Карелия, 192 моста являются деревянными, при этом четверть из них находится в неудовлетворительном состоянии. Ряд железобетонных мостов, построенных в 60-х годах XX века, также требует выполнения работ по их реконструкции.
Авиационная инфраструктура в Республике Карелия не в полной мере соответствует нормативным требованиям.
Для некоторых населенных пунктов Республики Карелия авиация является единственным видом транспорта, обеспечивающим не только круглогодичную транспортную доступность, но и решение вопросов жизнедеятельности населения. Недостаточное развитие наземных коммуникаций, труднодоступность отдаленных, особенно северных районов, а также отсутствие альтернативного вида транспорта определяют необходимость развития авиационного сообщения в регионе.
Указанные обстоятельства отрицательно влияют на инвестиционную привлекательность Республики Карелия и сохраняют негативные тенденции в экономике и доходной части бюджета, угрожая нарастанием социальной напряженности.
Присоединение Российской Федерации ко Всемирной торговой организации и углубление процессов евразийской экономической интеграции обусловливают необходимость модернизации действующих производств (прежде всего градообразующих) и создания производств в новых секторах экономики в целях ускорения экономического развития региона.
Государственная поддержка развития Республики Карелия осуществляется в рамках ряда федеральных целевых программ. Однако острота и масштабность сложившейся ситуации в экономике Республики Карелия требуют применения программно-целевого метода решения проблемы стабилизации экономического положения Республики Карелия для обеспечения в обозримой перспективе базиса устойчивого экономического роста и диктуют необходимость концентрации усилий отраслевых ведомств, различных видов государственной поддержки и финансовой помощи за счет средств федерального бюджета в рамках отдельной федеральной целевой программы.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией развития регионов России, в долгосрочной перспективе устраняются путем стимулирования самостоятельного экономического развития субъектов Российской Федерации и их кооперации, повышения инвестиционной и предпринимательской активности, укрепления бюджетной обеспеченности, совершенствования межбюджетных отношений, расширения количества центров экономического роста, в том числе территорий опережающего социально-экономического развития.
В соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. N 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года", выполнение основных задач в сфере социального развития Арктической зоны обеспечивается путем модернизации первичного звена здравоохранения, создания условий для увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, формирования в населенных пунктах современной городской среды.
Таким образом, поставленные в рамках Программы задачи будут охватывать наиболее актуальные и приоритетные для Республики Карелия проблемы, предусматривать реконструкцию существующих предприятий и объектов инфраструктуры, в том числе социальной, а также строительство новых производств с созданием рабочих мест. Выполнение Программы позволит осуществлять мероприятия по развитию Республики Карелия в едином комплексе, согласовывать приоритеты федерального, регионального и местного уровней, координировать действия всех заинтересованных сторон и концентрировать ресурсы при решении поставленных задач.
Целесообразность применения программно-целевого метода обусловлена тем, что в рамках Программы предполагается реализация экономически значимых проектов, в том числе направленных на снятие инфраструктурных ограничений Республики Карелия, что потребует достижения баланса интересов власти, общества и бизнеса.
Использование программно-целевого метода позволит обеспечить следующие важнейшие условия для осуществления государственной региональной политики в Республике Карелия:
комплексность механизма, скоординированного по задачам, ресурсам и срокам осуществления производственных, экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем Республики Карелия;
координация государственных усилий по обеспечению экономического роста и стратегическое единство в принятии решений на всех уровнях исполнительной власти;
аккумулирование расходов бюджетов всех уровней для реализации Программы, а также координация, планирование и контроль таких расходов.
Реализация Программы приведет к сокращению диспропорции в региональном развитии и в развитии Республики Карелия и Российской Федерации в целом, а также к улучшению условий для обеспечения экономического роста региона.

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,
целевые индикаторы и показатели Программы

Целями Программы являются развитие экономического потенциала Республики Карелия и его реализация.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие основные задачи:
повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики;
инфраструктурное обеспечение экономического развития.
Указанные задачи требуют детализации для обоснования их необходимости и достаточности исходя из обеспечения достижения целей Программы.
Мероприятия Программы, направленные на повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, включают в себя реализацию ряда инвестиционных проектов по развитию производств в сфере горнопромышленного и лесопромышленного комплексов, производства транспортных средств и металлургии, а также по развитию генерирующих мощностей.
Инфраструктурное обеспечение экономического развития предусматривает реализацию проектов, способствующих совершенствованию транспортной логистики, грузо- и пассажирооборота автомобильным, морским, железнодорожным и авиационным транспортом, создание необходимой инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство для семей, имеющих 3 и более детей, строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства и социальной сферы, а также развитие энергетической инфраструктуры.
Таким образом, Программа направлена на развитие Республики Карелия путем решения наиболее острых и актуальных проблем.
Общий срок реализации Программы составляет 8 лет (2016 - 2023 годы). Программу предлагается осуществить в 2 этапа.
Основной целью I этапа реализации Программы (2016 - 2017 годы) является модернизация базовых предприятий и секторов экономики и снятие инфраструктурных ограничений экономического развития.
Основной целью II этапа реализации Программы (2018 - 2023 годы) является создание новых предприятий и секторов экономики, а также развитие коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении N 1.
Реализация Программы может быть досрочно прекращена решением Правительства Российской Федерации по итогам рассмотрения вопроса о ее эффективности.

III. Мероприятия Программы

Решение комплекса задач и выполнение мероприятий Программы ведет к достижению целей Программы - развитие экономического потенциала Республики Карелия и его реализация.
В рамках Программы предусмотрено решение 3 задач по 7 направлениям.
Задача по повышению конкурентоспособности базовых и созданию новых производств и секторов экономики предусматривает выполнение мероприятий Программы и реализацию проектов в рамках Программы по следующим направлениям.
Направлением, связанным с развитием промышленности, предусматривается реализация ряда инвестиционных проектов по развитию производств в сфере горнопромышленного и лесопромышленного комплексов, производства транспортных средств и металлургии, а также по развитию генерирующих мощностей, направленных на повышение конкурентоспособности базовых секторов экономики.
В горнопромышленном комплексе планируется наращивание объемов выпускаемой продукции за счет модернизации производств, создания новых щебеночных предприятий.
Реализация в рамках Программы инвестиционных проектов горнопромышленного комплекса позволит увеличить объемы производства строительных нерудных материалов (гранулы, крошка и порошок, галька, гравий, в том числе щебень) до 22,7 млн. куб. метров в год.
Реализация в рамках Программы инвестиционных проектов на основе рационального и эффективного недропользования на территории Республики Карелия позволит обеспечить рост вклада горнопромышленного комплекса в развитие экономики Республики Карелия и повышение за счет этого благосостояния ее населения. Результатом станет привлечение инвестиций за счет средств внебюджетных источников в размере 23 млрд. рублей.
В лесопромышленном комплексе предусматривается повышение эффективности переработки лесных ресурсов, в том числе за счет реконструкции, модернизации и расширения производства таких организаций, как акционерное общество "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат", общество с ограниченной ответственностью Деревообрабатывающий комбинат "Калевала" и других организаций.
Реализация в рамках Программы инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе позволит увеличить объемы производства пиломатериалов до 1018 тыс. куб. метров, ориентированно-стружечных плит - до 400 тыс. куб. метров, бумаги - до 1050 тыс. тонн, мешков бумажных - до 500 млн. штук. Предусматривается создание 500 новых рабочих мест и привлечение инвестиций за счет средств внебюджетных источников в размере 30,1 млрд. рублей.
В рамках указанного направления планируется также ввод в эксплуатацию двух малых гидроэлектростанций Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кемском районе Республики Карелия, позволяющих сократить дефицит электрической энергии в регионе на 49,8 МВт. В рамках реализации проекта "Развитие судостроительного производства" было осуществлено восстановление судостроения на базе имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" в результате приобретения имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт". В 2020 году в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. N 973-р, осуществлена загрузка производственных мощностей Акционерного общества "Онежский судостоительно-судоремонтный завод" до 2024 года, завод заключил договоры с группой компаний "Русский краб" и в марте 2020 г. приступил к строительству 7 судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба. Суда должны быть построены в течение 5 лет - с 2020 года по 2024 год. Обеспечена загрузка завода на 5 лет серийным строительством судов.
В рамках направления, связанного с развитием агропромышленного комплекса, в 2020 году реализован инвестиционный проект по строительству в г. Кондопога рыбоперерабатывающего завода с холодильником по переработке трески, пикши и иных видов рыб производственной мощностью свыше 30 тыс. тонн сырья в год. С 2016 года осуществлялась реализация проекта по развитию мясного скотоводства абердин-ангусской породы с объемом производства 500 тонн мяса в живом весе в год.
В рамках направления, связанного с созданием промышленной площадки, предусматривается формирование инвестиционной площадки, обеспеченной необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой и энергетическими мощностями, предназначенной для размещения промышленных производств в г. Петрозаводске. В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. N 973-р, на территории промышленной площадки в г. Петрозаводске будет осуществлено строительство промышленных зданий к 2024 году.
Целью этого проекта является диверсификация экономики Республики Карелия за счет создания благоприятных условий для размещения новых производств и привлечения инвесторов.
Создание промышленной площадки и строительство на ней промышленного парка в сочетании с проведением активной инвестиционной политики, предусматривающей в том числе совершенствование информационного обеспечения инвесторов, будут способствовать привлечению инвестиций в экономику Республики Карелия.
Наличие промышленного парка позволит в перспективе привлечь ряд новых резидентов для организации дополнительных производств в сфере камнеобработки, деревообработки и обрабатывающей индустрии и конвейерной сборки.
Направлением, связанным с развитием внешнеэкономической деятельности, предусматриваются строительство и техническое перевооружение международного автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Сювяоро (далее - международный автомобильный пункт пропуска) и таможенно-логистического терминала (Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия) за счет средств внебюджетных источников.
Реализация в рамках Программы указанных проектов позволит создать новые рабочие места, связанные с приемом туристов, обслуживанием пассажиров и обработкой грузов, а также новые предприятия, вследствие чего увеличится налогооблагаемая база.
Строительство международного автомобильного пункта пропуска и таможенно-логистического терминала планируется осуществить за счет средств внебюджетных источников. Целью такого строительства является развитие внешнеэкономических связей и въездного туризма в Приладожье и в южной части Республики Карелия. Этот проект поддержан Правительством Ленинградской области и руководством сопредельных региональных союзов Финляндской Республики. Международный автомобильный пункт пропуска позволит значительно улучшить логистику пассажирских и грузовых перевозок по реконструируемой в настоящее время федеральной трассе "Сортавала" (А-121), автомобильной дороге регионального значения "Ихала - Райвио - госграница". После завершения строительства международного автомобильного пункта пропуска и принятия его в эксплуатацию он будет передан в федеральную государственную собственность. Прием в эксплуатацию таможенно-логистического терминала позволит значительно сократить время прохождения грузов через международный автомобильный пункт пропуска, что повысит его пропускную способность, а также сократит последующие затраты федерального бюджета на его техническое содержание.
Для устранения инфраструктурных ограничений требуется в первоочередном порядке создать необходимые условия для развития транспортной и энергетической инфраструктуры, а также необходимой инфраструктуры в социальной сфере.
В среднесрочной перспективе предусматривается увеличение пропускной способности автомобильных дорог на территории Республики Карелия, соответствующей растущему объему промышленного производства с учетом освоения новых месторождений и создания предприятий.
Задача по инфраструктурному обеспечению экономического развития предусматривает реализацию мероприятий и проектов по следующим направлениям.
Направлением, связанным с развитием транспортного комплекса и дорожного строительства, предусматривается реализация проектов, способствующих совершенствованию транспортной логистики, грузо- и пассажирооборота посредством автомобильного, морского, железнодорожного и авиационного транспорта.
За счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, уже построено 4 капитальных мостовых перехода взамен аварийных деревянных, выполнена реконструкция мостового сооружения через реку Неглинка по улице Кирова в г. Петрозаводске, осуществлен первый этап реконструкции участка автомобильной дороги Олонец - Вяртсиля, км 96 - км 118, строительство автомобильной дороги "Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, км 106 - Больничный". Также планируется завершить строительство 3 капитальных мостовых переходов взамен аварийных деревянных, выполнить реконструкцию ул. Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса в г. Петрозаводске, реконструкцию участка автомобильной дороги Петрозаводск - Суоярви, км 25 - км 33, реконструкцию мостового перехода на км 9+950 автомобильной дороги "Кола", км 748 - Сегежа и строительство мостового перехода по улице Промышленная в г. Сортавала через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари взамен существующего наплавного понтонного моста.
Выполнение указанных мероприятий позволит обеспечить приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние участков автомобильных дорог, а также создать условия для реализации проектов по развитию промышленности и туризма.
В сфере развития пассажирских перевозок в 2020 году завершено строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта Петрозаводск, реализованное за счет средств федерального бюджета при софинансировании бюджета региона, выполнена реконструкция железнодорожного вокзала г. Петрозаводска за счет средств внебюджетных источников, также осуществляется реализация мероприятия по реконструкции автовокзала в г. Петрозаводске, опорной сети автостанций Республики Карелия с привлечением средств федерального бюджета. Количество реконструируемых объектов для обеспечения пассажирских перевозок определяется предусмотренными объемами финансирования в рамках Программы.
Задача по развитию социальной сферы предусматривает реализацию мероприятий и проектов по направлению, связанному со строительством и реконструкцией объектов коммунального хозяйства, социальной сферы и туризма, предусматривается реализация мероприятий по повышению качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения в районах Республики Карелия, уровня газификации региона, а также развитие социальной инфраструктуры.
Реализация проекта строительства объектов необходимой инфраструктуры на земельных участках, предназначенных под жилищное строительство для многодетных семей, осуществляется в целях выполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и направлена на решение основной проблемы, препятствующей многодетным семьям начать строительство жилых домов на предоставленных или планируемых к предоставлению земельных участках в Республике Карелия (отсутствие необходимой инфраструктуры), а также создать условия для улучшения качества жизни людей.
В рамках этого направления проведена реконструкция здания пожарного депо в г. Беломорске, а также осуществлено приобретение одного здания пожарного депо и его реконструкция в пос. Кривой Порог.
В результате осуществления указанных мероприятий обеспечено соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также создание условий для надлежащего выполнения служебных обязанностей личным составом противопожарной службы и требуемого содержания специальной техники и оборудования.
В рамках развития инфраструктуры в сфере здравоохранения предполагается строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы в г. Петрозаводске, отделения судебно-медицинской экспертизы трупов с гистологической лабораторией государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Бюро судебно-медицинской экспертизы" в г. Петрозаводске, реконструкция здания стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи", ул. Кирова, д. 40 (пристройка приемного отделения), реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы, надстройка приемного отделения для размещения помещений ангиографического отделения, реконструкция нежилых помещений под детскую поликлинику в г. Сегежа, а также реконструкция здания стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи", этап "Строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации".
Строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы позволит вывести на новый уровень оказание помощи населению Республики Карелия, в том числе создать условия для получения качественных медицинских услуг населением интенсивно застраиваемых жилых районов г. Петрозаводска "Древлянка" и "Перевалка" и организовать стационарное обслуживание жителей Республики Карелия путем расширения до существующих нормативов ряда специализированных стационарных отделений государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Республиканская больница им. В.А. Баранова".
Строительство нового здания отделения судебно-медицинской экспертизы трупов с гистологической лабораторией государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Бюро судебно-медицинской экспертизы" в г. Петрозаводске позволит обеспечить внедрение современных технологий экспертных исследований, развитие методического сопровождения компонента экспертного процесса для районных подразделений, организационное объединение гистологических исследований на территории Республики Карелия, доступность, этапность и преемственность между этапами проведения экспертиз трупов и гистологических исследований.
В связи с необходимостью распределения потоков поступающих пациентов и определения тяжести заболевания и травм в кратчайшие сроки, а также оказания первой экстренной помощи предусматривается выполнить реконструкцию здания стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи", ул. Кирова, д. 40, с пристройкой приемного отделения.
В целях улучшения оказания высокотехнологичной медицинской помощи и снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний населения Республики Карелия существует необходимость в первоочередных мерах по укреплению материально-технической базы регионального сосудистого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Республиканская больница им. В.А. Баранова". Необходимо осуществить реконструкцию терапевтического корпуса с надстройкой приемного отделения для размещения ангиографического отделения с установкой и вводом в эксплуатацию новой ангиографической установки, создания полноценной ангиографической операционной, отвечающей требованиям санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", с оснащением указанного корпуса лечебно-диагностическим медицинским оборудованием.
Реконструкция нежилых помещений под детскую поликлинику в г. Сегежа позволит существенно улучшить доступность оказания медицинской помощи детскому населению Сегежского муниципального района, повысить ее качество и снизить заболеваемость детей.
Строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи" позволит в значительной степени повысить уровень экстренной медицинской помощи, улучшит качество жизни больных, предотвратит или значительно отсрочит утрату трудоспособности, увеличит продолжительность жизни населения г. Петрозаводска и Республики Карелия в целом.
В рамках развития инфраструктуры в сфере образования осуществляется строительство детских садов в пос. Ляскеля (Питкярантский муниципальный район) на 110 мест, в пос. Ильинский (Олонецкий национальный муниципальный район) на 200 мест и строительство детского сада в г. Петрозаводске на 280 мест. Реализация этих мероприятий позволит решить вопрос с обеспечением детей местами в дошкольных образовательных организациях в необходимом объеме в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса.
В рамках развития инфраструктуры сферы культуры проводится реконструкция административного здания муниципального бюджетного учреждения "Сегежская централизованная библиотечная система". Также в 2020 году завершены реконструкция и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - здания, расположенного в г. Беломорске, ул. Банковская, д. 26, для создания Музея Карельского фронта, представляющего историю Карельского фронта во время Великой Отечественной войны.
Реконструкция Сегежской централизованной библиотечной системы решает задачи формирования единого культурного и информационного пространства на основе использования имеющегося потенциала и создания новых компонентов культурно-досуговой деятельности, создания оптимальных условий для активного и разнообразного досуга, самореализации и духовного развития жителей г. Сегежа, прежде всего подрастающего поколения.
В рамках развития инфраструктуры физической культуры и спорта в период с 2019 по 2020 годы реализованы следующие мероприятия:
реконструкция здания спортивного комплекса, расположенного в пос. Боровой (Калевальский муниципальный район, Республика Карелия), ул. Советская, д. 15.
Реконструкция здания спортивного комплекса способствует повышению уровня обеспеченности населения пос. Боровой и Калевальского муниципального района современными спортивными сооружениями, обеспечению возможности проведения учебно-тренировочного процесса, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на профессиональном уровне, достижению высоких результатов спортсменами района на соревнованиях, приобщению населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также созданию условий для укрепления здоровья населения, проживающего на территории Боровского сельского поселения;
реконструкция стадиона муниципального общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная школа N 3.
Реконструкция стадиона обеспечивает возможность проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на профессиональном уровне, достижения высоких результатов спортсменами района на соревнованиях, приобщения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создания условий для укрепления здоровья детей, проживающих на территории Сортавальского муниципального района;
реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия" в г. Костомукше.
Благодаря реконструкции стадиона созданы условия для занятий физической культурой и спортом, а также для укрепления здоровья учащихся этого общеобразовательного учреждения.
На стадионе проводятся не только занятия в рамках школьной, но и в рамках внешкольной программы. Стадион стал местом тестирования установленных требований знакам отличия "Готов к труду и обороне" по легкой атлетике и гимнастике для жителей г. Костомукши;
первый этап реконструкции легкоатлетического ядра стадиона в г. Олонце.
Реализация первого этапа реконструкции легкоатлетического ядра стадиона в г. Олонце (Республика Карелия) создала условия для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, развития массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также для развития спорта высших достижений на территории Олонецкого национального муниципального района;
реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, расположенного в г. Сегежа, ул. Лесокультурная.
Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, расположенного в г. Сегежа, позволила увеличить уровень обеспеченности населения г. Сегежа и Сегежского муниципального района спортивными сооружениями, обеспечить возможность проведения учебно-тренировочного процесса, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на профессиональном уровне (достижение высоких результатов спортсменами района на региональных и всероссийских соревнованиях), приобщать население к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также создала условия для укрепления здоровья населения, проживающего на территории Сегежского муниципального района.
В рамках развития инфраструктуры физической культуры и спорта в период с 2021 по 2023 год будут реализованы следующие мероприятия:
второй этап реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы Школы высшего спортивного мастерства в Прионежском муниципальном районе (местечко Ялгуба);
второй этап строительства спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе здания N 12 по ул. Крупской и здания N 38 по ул. Красной в г. Петрозаводске.
Реализация второго этапа мероприятия по реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы Школы высшего спортивного мастерства в Прионежском муниципальном районе (местечко Ялгуба) с единовременной пропускной способностью от 110 до 150 человек (в зависимости от времени года) способствует развитию спортивной инфраструктуры, повышению доступности и качества спортивных сооружений для регулярных занятий физической культурой и спортом.
Реализация второго этапа строительства спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе здания N 12 по ул. Крупской и здания N 38 по ул. Красной в г. Петрозаводске позволит решить вопрос нехватки ледовых арен, катков для занятий детско-юношеских спортивных школ хоккеем, фигурным катанием и конькобежным спортом, в том числе круглогодичного использования. Основным сооружением второго этапа является открытый конькобежный стадион с открытыми трибунами. Максимальная единовременная пропускная способность объекта - 234 человека.
В рамках указанного направления реализуются мероприятия по строительству и реконструкции 4 объектов водоснабжения и водоотведения, а также по строительству 11 объектов инфраструктуры газоснабжения.
Направлением, связанным с развитием энергетической инфраструктуры, предусматривается улучшение доступа к источникам электрической энергии для реализации проектов в г. Петрозаводске.
Строительство воздушной линии электропередачи 330 кВ Ондская - Петрозаводск (2-я воздушная линия) на новом земельном участке необходимо для увеличения ее пропускной способности в целях транзита электрической энергии между энергосистемой Мурманской области и энергосистемой Республики Карелия для выдачи "запертой" мощности электростанций энергосистемы Мурманской области и покрытия дефицита энергосистемы Республики Карелия, что приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Карелия за счет снижения рисков аварийного выделения энергосистемы на изолированную работу с дефицитом мощности.
Выполнение указанных мероприятий предусматривает комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации. В первую очередь, эти меры касаются неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды. Защита окружающей среды будет обеспечена путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и экологическим требованиям.
Выполнение мероприятий Программы позволит к 2023 году достичь значений целевых индикаторов и показателей Программы, предусмотренных приложением N 1 к Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Республики Карелия и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций, инвесторов).
Предложения в отношении распределения затрат между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации разработаны с учетом сложившейся финансово-экономической ситуации в Республике Карелия, характеризуемой значительным объемом дефицита регионального бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 91431,2919 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 16207,0543 млн. рублей;
средств консолидированного бюджета Республики Карелия - 1977,4399 млн. рублей;
средств внебюджетных источников - 73246,7977 млн. рублей.
Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется исходя из бюджетной заявки на очередной финансовый год, представляемой государственным заказчиком Программы и принятой с учетом возможностей бюджета, потребностей Программы и необходимости продолжения ранее начатых (переходящих) работ.
При этом государственным заказчиком Программы в отношении объектов государственной собственности Республики Карелия и объектов муниципальной собственности является Министерство экономического развития Российской Федерации, а в части строительства и реконструкции сети автомобильных дорог - Федеральное дорожное агентство.
Средства внебюджетных источников планируется привлекать в форме кредитов, различных видов займов, а также в виде собственных средств предприятий-инвесторов.
Объемы финансирования Программы приведены без учета финансирования проектов и мероприятий, входящих в другие федеральные целевые программы или непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы.
Прочие текущие мероприятия определены в соответствии с целевым содержанием Программы.
Предельные объемы финансирования Программы по источникам расходования приведены в приложении N 2.
Предельные объемы финансирования Программы из федерального бюджета по государственным заказчикам приведены в приложении N 3.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 4.
Сведения о целевых индикаторах и показателях опережающего развития Беломорского, Кемского, Лоухского, Сегежского муниципальных районов и Костомукшского городского округа Республики Карелия, включенных в состав Арктической зоны Российской Федерации, приведены в приложении N 5.
Информация о мероприятиях по опережающему развитию Беломорского, Кемского, Лоухского, Сегежского муниципальных районов и Костомукшского городского округа Республики Карелия, включенных в состав Арктической зоны Российской Федерации, приведена в приложении N 6.

V. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственными заказчиками Программы являются:
Министерство экономического развития Российской Федерации;
Федеральное дорожное агентство.
Разработчиками Программы являются Министерство экономического развития Российской Федерации и Правительство Республики Карелия.
Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы и достижения планируемых результатов, а также предусматривает проведение организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения целей и решения задач Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий Программы.
Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом предложений всех заинтересованных организаций (включая некоммерческие объединения и ассоциации), направленных на решение задач Программы, а также на выполнение мероприятий в экономической, финансовой, производственно-технической и социальной сферах.
Государственный заказчик - координатор Программы формирует организационную структуру управления Программой, разрабатывает и утверждает план мероприятий Программы, а также обеспечивает контроль за их реализацией.
Управление Программой осуществляется на федеральном и региональном уровнях.
На федеральном уровне государственный заказчик - координатор Программы выполняет следующие функции:
разработка и реализация мероприятий Программы;
разработка сводной бюджетной заявки;
научно-информационное обеспечение Программы;
подготовка ежеквартальных докладов о ходе выполнения работ по реализации Программы и об эффективности использования финансовых средств и направление их в Министерство финансов Российской Федерации в установленные сроки.
Министерство экономического развития Российской Федерации заключает с Правительством Республики Карелия соглашения (договоры) о финансировании строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности или собственности Республики Карелия (за исключением соглашений (договоров) о финансировании строительства и реконструкции сети автомобильных дорог и мостовых сооружений, государственным заказчиком которых является Федеральное дорожное агентство).
Федеральное дорожное агентство заключает с Правительством Республики Карелия соглашения (договоры) о финансировании строительства и реконструкции сети автомобильных дорог и мостовых сооружений.
При этом Программой предусмотрено привлечение средств консолидированного бюджета Республики Карелия преимущественно на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов республиканской и муниципальной собственности.
Министерство экономического развития Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство прекращают финансирование строительства и (или) реконструкции объектов в случае невыполнения Республикой Карелия обязательств по их реализации.
Субсидии предоставляются в целях финансирования расходных обязательств Республики Карелия по реализации государственных и (или) муниципальных программ в рамках следующих направлений реализации Программы:
создание инфраструктуры промышленной площадки на территории Республики Карелия;
реконструкция объектов опорной сети автостанций Республики Карелия;
реконструкция и приобретение пожарных депо на территории Республики Карелия;
строительство и реконструкция сети автомобильных дорог и мостовых сооружений;
обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более детей;
реконструкция и строительство зданий под размещение государственных объектов здравоохранения;
строительство зданий под размещение дошкольных образовательных учреждений;
реконструкция зданий под размещение государственных учреждений культуры, в том числе проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
строительство и реконструкция объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта;
строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения;
строительство объектов инфраструктуры газоснабжения;
строительство объекта гражданской авиации.
В государственные программы Республики Карелия в обязательном порядке подлежат включению мероприятия по разработке проектной документации и проведению работ, связанных с выделением и государственной регистрацией земельных участков, необходимых для выполнения мероприятий Программы.
В отношении объектов, проектная документация на которые разработана после 1 сентября 2015 г., применяются нормы и требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Ответственность за своевременное финансирование мероприятий Программы путем предоставления субсидии, а также за их выполнение возлагается на органы исполнительной власти Республики Карелия.
Государственные заказчики Программы вправе по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы уточнять объемы финансирования мероприятий Программы без изменения общих параметров финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и ухудшения значений индикаторов Программы.
Функциональный механизм реализации Программы включает в себя следующие элементы:
стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики социально-экономического развития Республики Карелия и ее основных секторов экономики);
экономические рычаги воздействия, позволяющие активизировать финансово-кредитный механизм Программы и стимулировать выполнение мероприятий Программы;
правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совокупность нормативных правовых документов федерального и регионального уровней, способствующих развитию деловой и инвестиционной активности и регулирующих отношения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия, заказчиков и исполнителей Программы в процессе выполнения ее мероприятий и отдельных проектов);
организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).
Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться при условии обязательного рассмотрения результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетный период с учетом:
полноты и эффективности выполнения мероприятий Программы, целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;
финансирования Программы по годам, источникам финансирования и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при утверждении Программы;
заявленных объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющим на динамику социально-экономического развития Республики Карелия.
Государственный заказчик - координатор Программы выполняет следующие функции по управлению реализацией Программы:
осуществление координации деятельности государственных заказчиков Программы по подготовке и эффективному выполнению ее мероприятий;
принятие мер по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий Программы;
внесение в установленном порядке предложений о корректировке Программы;
подготовка докладов о ходе реализации Программы.
Государственные заказчики Программы осуществляют следующие функции по управлению Программой:
уточнение размера средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, представление предложений по размерам и направлениям расходов в рамках Программы на очередной финансовый год и плановый период;
получение ежегодно (целевым назначением) бюджетных ассигнований на реализацию Программы на очередной финансовый год;
разработка мер по привлечению средств внебюджетных источников для выполнения мероприятий Программы;
обеспечение контроля за выполнением мероприятий Программы и за соответствием результатов реализации Программы целевым индикаторам и показателям;
отчет в установленном порядке о ходе реализации Программы, в том числе представление государственной статистической отчетности о ходе реализации Программы.
При этом отчеты (ежеквартальные и годовые) о ходе реализации Программы, включающие информацию об использовании средств федерального бюджета, представляются Правительством Республики Карелия по установленной форме и в сроки, которые установлены государственным заказчиком - координатором Программы.
Ответственность за ежеквартальное и ежегодное обеспечение актуализации целевых индикаторов и показателей Программы в целях принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке возлагается на органы исполнительной власти Республики Карелия.
Управление Программой осуществляется ее государственными заказчиками в рамках текущего финансирования.

VI. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы

Реализация Программы позволит обеспечить создание экономических условий для устойчивого развития Республики Карелия с учетом геостратегических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации.
В рамках реализации Программы предполагается достичь следующих основных показателей:
инвестиции в основной капитал (по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах);
уровень общей безработицы;
доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы;
число созданных рабочих мест;
прирост производства строительных нерудных материалов (гранулы, крошка и порошок, галька, гравий, в том числе щебень);
прирост производства ориентированно-стружечных плит;
количество созданных промышленных площадок;
протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Карелия;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия;
количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений;
количество реконструированных объектов опорной сети автостанций Республики Карелия;
количество реконструированных и приобретенных пожарных депо на территории Республики Карелия;
количество семей, имеющих 3 и более детей, которым предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках Программы;
количество построенных и реконструированных объектов в сфере здравоохранения;
созданная площадь под размещение государственных объектов здравоохранения;
количество реконструированных объектов в сфере культуры, в том числе с целью приспособления к современному использованию;
количество мест, созданных в дошкольных образовательных организациях;
количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
количество построенных и реконструированных объектов инфраструктуры физической культуры и спорта;
количество построенных зданий аэровокзальных комплексов.
Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, основана на результатах выполнения мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.
Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими показателями:
степень соответствия фактического и планового уровней использования бюджетных средств;
степень исполнения плана выполнения мероприятий Программы;
степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка экологической эффективности Программы определяется по итогам разработки проектной документации.
Степень соответствия фактического и планового уровней использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.
Оценка степени исполнения плана мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:
полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;
достижение запланированных результатов выполнения мероприятий Программы.
Для выявления степени достижения целей и решения задач Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых индикаторов и показателей Программы сопоставляются с их плановыми значениями.
Правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование мероприятий Программы приведены в приложении N 7.
Адресное (пообъектное) распределение субсидий на 2022 - 2023 годы по мероприятиям Программы приведено в приложении N 8.
Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, приведена в приложении N 9.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 10.
Методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 11.
Перечень государственных программ Республики Карелия, предусматривающих софинансирование мероприятий Программы, приведен в приложении N 12.

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА"

Наименование показателя	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя	
		I этап	II этап	прирост в 2023 году к 2015 году, единиц (процентных пунктов)	
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
Цель "Развитие и реализация экономического потенциала Республики Карелия"	
Инвестиции в основной капитал (по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах), процентов	90,6	109,5	101	104	100,5	102	101,2	101,2	101,5	22,6	
Уровень общей безработицы, процентов	8,8	9,2	8,6	8,7	7,4	7,8	8,3	7,7	7,3	-1,5	
Доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы, процентов	-	98,6	96,1	85,3	74	44,6	72,2	66,9	50,8	80,1 <1>	
Задача 1 "Повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики"	
Число созданных рабочих мест, тыс. единиц	2,7	2,3	1,2	3,5	2,9	2,5	2,2	2,5	3	20,1	
Прирост производства строительных нерудных материалов (гранулы, крошка и порошок, галька, гравий, в том числе щебень), тыс. куб. м	-	-	-	-	1000	250	700	800	900	+3650	
Прирост производства ориентированно-стружечных плит, тыс. усл. куб. м	-	-	-	-	100	50	-	50	50	+250	
Количество созданных промышленных площадок, единиц	-	-	-	-	1	-	-	-	-	+1	
Задача 2 "Инфраструктурное обеспечение экономического и социального развития"	
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Карелия, км	-	-	-	-	13,5	-	1,012	-	9,315	+23,827	
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия, процентных пунктов	29	30	31	32	33	35,2	39,25	42,85	46,49	+17,49	
Количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений, единиц	-	-	-	-	2	6	-	-	2	+10	
Количество реконструированных объектов опорной сети автостанций Республики Карелия, единиц	-	-	-	-	-	-	3	-	-	+3	
Задача 3 "Развитие социальной сферы"	
Количество реконструированных и приобретенных пожарных депо на территории Республики Карелия, единиц	-	-	1	-	1	-	-	-	-	+2	
Количество семей, имеющих 3 и более детей, которым предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках Программы, семей	-	-	-	-	-	45	-	-	-	+45	
Количество построенных и реконструированных объектов в сфере здравоохранения, единиц	-	-	-	-	-	2	1	-	3	+6	
Созданная площадь под размещение государственных объектов здравоохранения, тыс. кв. м	-	-	-	-	-	-	-	-	14	+14	
Количество реконструированных объектов в сфере культуры, в том числе с целью приспособления к современному использованию, единиц	-	-	-	-	-	1	1	-	-	+2	
Количество мест, созданных в дошкольных образовательных организациях, единиц	-	-	-	-	-	-	590	-	-	+590	
Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, единиц	-	-	-	-	7	8	-	-	-	+15	
Количество построенных и реконструированных объектов инфраструктуры физической культуры и спорта, единиц	-	-	-	-	4	1	-	-	2	+7	
Количество построенных зданий аэровокзальных комплексов, единиц	-	-	-	-	-	1	-	-	-	+1	

--------------------------------
<1> За 2016 - 2023 годы.

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА"
ПО ИСТОЧНИКАМ РАСХОДОВАНИЯ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования (по направлению капитальные вложения)	Объем финансирования	
	2016 - 2023 годы - всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
Всего	91431,2919	14776,8	10213,7	21584,0154	12639,1607 <1>	7853,8361 <2>	11307,9862 <3>, <4>	9192,3752 <5>	6880,1097 <6>	
в том числе:	
федеральный бюджет (субсидии)	16207,0543	200	356,1	2984,7154	3275,2161 <1>	4087,7436 <2>	2572,9519 <3>, <4>	2562,4877 <5>	3184,531 <6>	
консолидированный бюджет Республики Карелия	1977,4399	13,2	44,3	190,2	210,1614	261,1594	572,2029	484,1375	202,0787	
внебюджетные источники	73246,7977	14563,6	9813,3	18409,1	9153,7832	3504,9331	8162,8314	6145,75	3493,5	

--------------------------------
<1> С учетом средств федерального бюджета в объеме 202,0492 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р, и средств федерального бюджета в объеме 75,1585 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 1,9915 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<2> С учетом средств федерального бюджета в объеме 297,9251 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 510,3997 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 11,0173 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<3> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1920,1416 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<4> Объем финансирования в размере 652,8103 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2021 году может быть уточнен в ходе исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
<5> Объем финансирования в размере 2562,4877 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2022 году может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
<6> Объем финансирования в размере 3184,531 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2023 году может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА" ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования	2016 - 2023 годы	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
Всего федеральный бюджет (субсидии)	16207,0543	200	356,1	2984,7154	3275,2161 <1>	4087,7436 <4>	2572,9519 <7>, <10>	2562,4877 <11>	3184,531 <12>	
Минэкономразвития России	
Всего федеральный бюджет (субсидии)	11923,6718	200	356,1	1922,4154	2423,915 <2>	3383,4874 <5>	1703,9879 <8>	1787,2475	2596,3993	
Росавтодор	
Всего федеральный бюджет (субсидии)	4283,3825	-	-	1062,3	851,3011 <3>	704,2562 <6>	868,964 <9>	775,2402	588,1317	

--------------------------------
<1> С учетом средств федерального бюджета в объеме 202,0492 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р, и средств федерального бюджета в объеме 75,1585 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 1,9915 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<2> С учетом средств федерального бюджета в объеме 202,0492 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р, и средств федерального бюджета в объеме 75,1585 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,2927 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<3> В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 1,6988 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<4> С учетом средств федерального бюджета в объеме 297,9251 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 510,3997 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 11,0173 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<5> С учетом средств федерального бюджета в объеме 297,9251 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 254,5985 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 0,4623 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<6> С учетом средств федерального бюджета в объеме 255,8012 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 10,555 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<7> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1920,1416 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<8> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1619,6871 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<9> С учетом средств федерального бюджета в объеме 300,4545 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<10> Объем финансирования в размере 652,8103 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2021 году может быть уточнен в ходе исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
<11> Объем финансирования в размере 2562,4877 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2022 году может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
<12> Объем финансирования в размере 3184,531 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2023 году может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование мероприятия, проектная мощность	Источники финансирования	Предельные объемы финансирования	
		2016 - 2023 годы - всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
Задача 1 "Повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики"	
Направление 1.1 "Развитие промышленности"	
Горнопромышленный комплекс	
1.	Модернизация акционерного общества "Карельский окатыш" (г. Костомукша), 10,5 млн. тонн железорудных окатышей в год	всего	18749,3	3960	2000	2000	1725,5	63,8	3000	3000	3000	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	18749,3	3960	2000	2000	1725,5	63,8	3000	3000	3000	
2.	Строительство и ввод в эксплуатацию новых и модернизация действующих предприятий по производству щебня	всего	3885	2521,8	120	118,2	-	-	375	375	375	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	3885	2521,8	120	118,2	-	-	375	375	375	
3.	Строительство и ввод в эксплуатацию новых и модернизация действующих предприятий по производству блоков	всего	177	10	25	25	17	10	30	30	30	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	177	10	25	25	17	10	30	30	30	
	Лесопромышленный комплекс	
4.	Модернизация акционерного общества "Сегежский ЦБК"	всего	24644,55	4677,5	4000	9243,6	1189,2	765	2859	1910,25	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	24644,55	4677,5	4000	9243,6	1189,2	765	2859	1910,25	-	
5.	Реконструкция существующего производства целлюлозного завода в г. Питкяранта, общество с ограниченной ответственностью "РК-Гранд", 121 тыс. тонн целлюлозы в год	Всего	1191,5	157,7	-	92,3	461,5	255	75	75	75	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	1191,5	157,7	-	92,3	461,5	255	75	75	75	
6.	Модернизации общества с ограниченной ответственностью "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" (г. Петрозаводск)	всего	1291,6	255	184,6	-	-	-	483	355,5	13,5	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	1291,6	255	184,6	-	-	-	483	355,5	13,5	
7.	Создание производства лесоматериалов, строганого погонажа и клееных изделий, общество с ограниченной ответственностью НПО "ФинТек". Выпуск комплектов деревянного домостроения (г. Костомукша, п. Пяозерский Лоухский район), 11,1 тыс. куб. м строганого погонажа в год и 40 тыс. куб. м клееного бруса в год	всего	740,8	36,3	414	163	127,5	-	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	740,8	36,3	414	163	127,5	-	-	-	-	
8.	Создание производственных мощностей в рамках строительства 2 очереди инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью Деревообрабатывающий комбинат "Калевала" завода по производству ориентированно-стружечных плит (г. Петрозаводск), 500 тыс. куб. м плиты в год	всего	2222,5	193,8	706,2	600	722,5	-	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	2222,5	193,8	706,2	600	722,5	-	-	-	-	
	Развитие производства машин и транспортных средств	
9.	Расширение судостроительных мощностей на базе Онежского судостроительного завода (г. Петрозаводск), от 4 судов в год	всего	200	195,4	4,6	-	-	-	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	200	195,4	4,6	-	-	-	-	-	-	
10.	Создание и освоение промышленного производства лесозаготовительной техники на производственных мощностях общества с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего"	всего	1265	-	-	-	340	425	500	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	1265	-	-	-	340	425	500	-	-	
11.	Поддержание и развитие производственных мощностей Филиала Акционерного общества "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г. Петрозаводск"	всего	776,4	-	-	-	288,7	415,2	72,47	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	776,4	-	-	-	288,7	415,2	72,5	-	-	
12.	Создание на базе общества с ограниченной ответственностью "ЛЗ "ПЗМ" центра компетенций в области отливок основных компонентов дизельных двигателей, проектная мощность 5735 тонн в год	всего	168,3314	-	-	-	-	-	168,3314	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	168,3314	-	-	-	-	-	168,3314	-	-	
	Развитие генерирующих мощностей	
13.	Строительство Белопорожских гидроэлектростанций ГЭС-1 и ГЭС-2, акционерное общество "Норд Гидро", 49,8 МВт	всего	10048,3	2306,6	1615,4	2000	3126,3	1000	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	10048,3	2306,6	1615,4	2000	3126,3	1000	-	-	-	
	Всего по направлению 1.1	65360,2814	14314,1	9069,8	14242,1	7998,2	2934	7562,8314	5745,75	3493,5	
		федеральный бюджет (субсидии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	65360,2814	14314,1	9069,8	14242,1	7998,2	2934	7562,8314	5745,75	3493,5	
	Направление 1.2 "Развитие агропромышленного комплекса"	
14.	Реализация проекта "Развитие мясного скотоводства абердин-ангусской породы в обществе с ограниченной ответственностью "Новое" в Республике Карелия", 500 тонн в живом весе в год	всего	548,8	230,8	200,6	62,2	27,6	27,6	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	548,8	230,8	200,6	62,2	27,6	27,6	-	-	-	
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Рыботорговая сеть". Строительство рыбоперерабатывающего завода с холодильником по переработке трески, пикши и иных видов рыб производственной мощностью свыше 30 000 тонн сырья в год на территории Кондопожского городского поселения, 30 тыс. тонн сырья в год	всего	1684,8	-	15	935	437,3	297,5	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	1684,8	-	15	935	437,3	297,5	-	-	-	
	Всего по направлению 1.2	2233,6	230,8	215,6	997,2	464,9	325,1	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	2233,6	230,8	215,6	997,2	464,9	325,1	-	-	-	
	Направление 1.3 "Создание промышленных (индустриальных) площадок"	
16.	Реализация инвестиционного проекта промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия, площадь промышленной площадки 32 га	всего	42,5	-	-	-	-	42,5	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	42,5	-	-	-	-	42,5	-	-	-	
17.	Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия, Строительство сетей водопровода и канализации - 6,9 км, электрических сетей 10 Кв - 18,8 км, газопровода - 2 км	всего	996,7505	207	382,9	171,3	264,8886 <1>	125,7866 <19>	59,3927 <37>	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	881,5507	200	356,1	160,7	248,2723 <1>	117,8504 <19>	55,6454 <37>	-	-	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	881,5507	200	356,1	160,7	248,2723 <1>	117,8504 <19>	55,6454 <37>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	72,6998	7	26,8	10,6	16,6163	7,9362	3,7473	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Всего по направлению 1.3	996,7505	207	382,9	171,3	264,8886 <1>	168,2866 <19>	59,3927 <37>	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	881,5507	200	356,1	160,7	248,2723 <1>	117,8504 <19>	55,6454 <37>	-	-	
		в том числе								-	-	
		Минэкономразвития России	881,5507	200	356,1	160,7	248,2723	117,8504 <19>	55,6454 <37>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	72,6998	7	26,8	10,6	16,6163	7,9362	3,7473	-	-	
		внебюджетные источники	42,5000	-	-	-	-	42,5000	-	-	-	
	Направление 1.4 "Развитие внешнеэкономической деятельности"	
18.	Строительство международного автомобильного пункта пропуска "Сювяоро" и таможенно-логистического терминала (Лахденпохский район). В соответствии с эскизным проектом, выполненным по заказу инвестора, проектная пропускная способность составит 5,5 тыс. транспортных средств в сутки	всего	696	-	-	696	-	-	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	696	-	-	696	-	-	-	-	-	
	Всего по направлению 1.4	696	-	-	696	-	-	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	696	-	-	696	-	-	-	-	-	
	Всего по задаче 1	69286,6319	14751,9	9668,3	16106,6	8727,9886 <1>	3427,3866 <19>	7622,2241 <37>	5745,75	3493,5	
		федеральный бюджет	881,5507	200	356,1	160,7	248,2723 <1>	117,8504 <19>	55,6454 <37>	-	-	
		в том числе:								-	-	
		субсидии	881,5507	200	356,1	160,7	248,2723 <1>	117,8504 <19>	55,6454 <37>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	72,6998	7	26,8	10,6	16,6163	7,9362	3,7473	-	-	
		внебюджетные источники	68332,3814	14544,9	9285,4	15935,3	8463,1	3301,6	7562,8314	5745,75	3493,5	
Задача 2 "Инфраструктурное обеспечение экономического развития"	
Направление 2.1 "Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства"	
19.	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Кеми (Торговый морской порт КЕМЬ), грузооборот первой очереди - 10 млн. тонн в год, второй очереди - 20 млн. тонн в год; численность работающих от 600 человек	всего	2725,1	-	320	2405,1	-	-	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	2725,1	-	320	2405,1	-	-	-	-	-	
20.	Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия, суточное отправление пассажиров 3260 - 5050 человек	всего	422,8245	-	-	-	89,9917 <2>	274,4556	158,5466 <38>	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	342,5768	-	-	-	84,5913 <2>	257,9855	100,1694 <38>	-	-	
		в том числе:		-	-	-				-	-	
		Минэкономразвития России	342,5768	-	-	-	84,5913 <2>	257,9855	100,1694 <38>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	80,2477	-	-	-	5,4004	16,4701	58,3772	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия. Реконструкция посадочной площадки, г. Сортавала, пос. Хелюля, годовое отправление 10000 - 15000 пассажиров	всего	73,4528	-	-	-	73,4528	-	-	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	69,0449	-	-	-	69,0449 <32>	-	-	-	-	
		в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Минэкономразвития России	69,0449	-	-	-	69,0449 <32>	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	4,4079	-	-	-	4,4079	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Строительство капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия (7 шт./180,3 пог. м)	всего	575,4999	-	-	316	131,2564	135,455 <35>	55,7151 <39>	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	537,7797	-	-	297	123,3797	127,955 <35>	52,3716 <39>	-	-	
		в том числе:		-	-					-	-	
		Росавтодор	537,7797	-	-	297	123,3797	127,955 <35>	52,3716 <39>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	37,7202	-	-	19	7,8767	7,5	3,3435	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Реконструкция зданий и сооружений вокзального комплекса, переустройство железнодорожной инфраструктуры, г. Петрозаводск, вместимость 420 пассажиров/сутки	всего	738,5	15	159,9	-	563,6	-	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	738,5	15	159,9	-	563,6	-	-	-	-	
24.	Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта Петрозаводск (Бесовец), не менее 300 пассажиров/час	всего	1013,7327	7,1	28,1	116,7	444,1957 <3>	423,6756 <20>	1,1643 <40>	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	919,4091	-	-	109,7	417,5438 <3>	398,2739 <20>	1,0943 <40>	-	-	
		в том числе:								-	-	
		Минэкономразвития России	919,4091	-	-	109,7	417,5438 <3>	398,2739 <20>	1,0943 <40>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	70,4236	3,4	7,9	7	26,6519	25,4017	0,07	-	-	
		внебюджетные источники	23,9000	3,7	20,2	-	-	-	-	-	-	
25.	Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район, до 200 пассажиров/сутки	всего	7,8743	1,9	-	5,6	0,3767 <4>	-	-	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	5,6517	-	-	5,3	0,3541 <4>	-	-	-	-	
		в том числе:		-	-			-	-	-	-	
		Минэкономразвития России	5,6517	-	-	5,3	0,3541 <4>	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	2,2226	1,9	-	0,3	0,0226	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Республики Карелия (8,012 км/22,1 пог. м)	всего	1439,5073	-	-	341,5	724,2846	613,0873 <21>	264,5195 <41>	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	1322,3203	-	-	321	680,8203	576,3012 <21>	248,0829 <41>	-	-	
		в том числе:		-	-					-	-	
		Росавтодор	1322,3203	-	-	321	680,8203	576,3012 <21>	248,0829 <41>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	117,1870	-	-	20,5	43,4643	36,7861	16,4366	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Республики Карелия в 2021 - 2023 годах (9,315 км, в том числе 514,88 пог. м)	всего	2242,78	-	-	-	-	-	660	900	682,78	
		федеральный бюджет (субсидии)	1931,8814	-	-	-	-	-	568,5095	775,2402	588,1317	
		в том числе:										
		Росавтодор	1931,8814	-	-	-	-	-	568,5095	775,2402	588,1317	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	310,8986	-	-	-	-	-	91,4905	124,7598	94,6483	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Строительство автодороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, км 106 - Больничный, 6,5 км	всего	522,8081	-	-	472,7	50,1081 <5>	-	-	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	491,4011	-	-	444,3	47,1011 <5>	-	-	-	-	
		в том числе:										
		Росавтодор	491,4011	-	-	444,3	47,1011 <5>	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	31,407	-	-	28,4	3,007	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Всего по направлению 2.1	9736,4332	24	508	3657,6	2077,266 <6>	1446,6735 <22>	1139,9455 <42>	900	682,78	
		федеральный бюджет (субсидии)	5620,065	-	-	1177,3	1422,8352 <6>	1360,5156 <22>	970,2277 <42>	775,2402	588,1317	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	1336,6825	-	-	115	571,5341 <6>	656,2594 <23>	101,2637 <43>	-	-	
		Росавтодор	4283,3825	-	-	1062,3	851,3011 <5>	704,2562 <36>	868,9640 <44>	775,2402	588,1317	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	628,8682	5,3	7,9	75,2	90,8308	86,1579	169,7178	124,7598	94,6483	
		внебюджетные источники	3487,5	18,7	500,1	2405,1	563,6	-	-	-	-	
	Всего по задаче 2	9762,0796	10,6	15,8	1327,7	1604,4968 <6>	1532,8314 <22>	1139,9455 <42>	900	682,78	
		федеральный бюджет	5620,065	-	-	1177,3	1422,8352 <6>	1360,5156 <22>	970,2277 <42>	775,2402	588,1317	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	1336,6825	-	-	115	571,5341 <6>	656,2594 <23>	101,2637 <43>	-	-	
		Росавтодор	4283,3825	-	-	1062,3	851,3011 <5>	704,2562 <36>	868,9640 <44>	775,2402	588,1317	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	654,5146	5,3	7,9	75,2	90,8308	86,1579	169,7178	124,7598	94,6483	
		внебюджетные источники	3487,5	5,3	7,9	75,2	90,8308	86,1579	-	-	-	
	Задача 3 "Развитие социальной сферы"	
	Направление 3.1 "Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства и социальной сферы"	
29.	Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей, 45 участков	всего	100,2221	-	-	78,9000	14,0483 <7>	20,2932 <24>	20,0069 <45>	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	92,2611	-	-	74,2000	13,2053 <7>	19,0757 <24>	18,8064 <45>	-	-	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	92,2611	-	-	74,2000	13,2053 <7>	19,0757 <24>	18,8064 <45>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	7,9610	-	-	4,7000	0,8430	1,2175	1,2005	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Реконструкция и приобретение зданий пожарных депо государственного казенного учреждения "Отряд противопожарной службы", увеличение площади зданий пожарных депо на 324,4 кв. м	всего	64,3776	0,9	6	48,3154 <8>	9,9814 <9>	0,6528 <25>	-	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	54,6154	-	-	46,1154 <8>	9,3598 <9>	0,6122 <25>	-	-	-	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	54,6154	-	-	46,1154 <8>	9,3598 <9>	0,6122 <25>	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	9,7622	0,9	6	2,2	0,6216	0,0406	-	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры здравоохранения, увеличение площади под размещение государственных объектов здравоохранения до 16,13 тыс. кв. м	всего	3314,2563	-	-	57,7	914,8247 <10>	1600,4659 <26>	1337,6860 <46>	290,1192	224,1036	
		федеральный бюджет (субсидии)	2747,1921	-	-	54,2	859,6608 <10>	1503,9578 <26>	1074,5213 <46>	162,4424	203,0529	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	2747,1921	-	-	54,2	859,6608 <10>	1503,9578 <26>	1074,5213 <46>	162,4424	203,0529	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	567,0642	-	-	3,5	55,1639	96,5081	263,1647	127,6768	21,0507	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	Реконструкция здания стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи", этап - Строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации, увеличение площади под размещение государственных объектов здравоохранения на 14 тыс. кв. м	Всего	3660	-	-	-	-	-	-	1464,0	2196	
		федеральный бюджет (субсидии)	3623,4	-	-	-	-	-	-	1449,36	2174,04	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	3623,4	-	-	-	-	-	-	1449,36	2174,04	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	36,6	-	-	-	-	-	-	14,64	21,96	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения (распределительной уличной сети 1240 куб. м/сут., 7 км, увеличение мощности газовой инфраструктуры до 100 км)	всего	1549,1512	-	-	1228,3	311,2950 <11>	300,2106 <27>	159,9009 <47>	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	1429,1686	-	-	1154,6	292,6142 <11>	282,2052 <27>	150,3045 <47>	-	-	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	1429,1686	-	-	1154,6	292,6142 <11>	282,2052 <27>	150,3045 <47>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	119,9826	-	-	73,7	18,6808	18,0054	9,5964	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	Строительство объектов инфраструктуры образования, увеличение количества мест в образовательных учреждениях на 590 мест	всего	846,1063	-	-	210,3	60,4239 <12>	510,7111 <28>	306,4705 <48>	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	689,7949	-	-	197,7	56,7979 <12>	480,0651 <28>	197,0311 <48>	-	-	
		в том числе										
		Минэкономразвития России	689,7949	-	-	197,7	56,7979 <12>	480,0651 <28>	197,0311 <48>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	156,3114	-	-	12,6	3,626	30,646	109,4394	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	Реконструкция объектов инфраструктуры культуры, в том числе с целью приспособления к современному использованию, 4150,18 кв. м полезной площади	всего	487,0253	-	3,6	4,3	313,7256 <13>	306,1536 <29>	77,4218 <49>	-	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	431,0365	-	-	4	294,8989 <13>	287,7836 <29>	62,5297 <49>	-	-	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	431,0365	-	-	4	294,8989 <13>	287,7836 <29>	62,5297 <49>	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	55,9888	-	3,6	0,3	18,8267	18,37	14,8921	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры спорта, единовременная пропускная способность от 215 до 425 человек	всего	934,5253	-	-	123,3	82,5240 <14>	37,9557 <30>	44,3305 <50>	392,506	283,7261	
		федеральный бюджет (субсидии)	637,97	-	-	115,9	77,5717 <14>	35,678 <30>	43,8858 <50>	175,4451	219,3064	
		в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Минэкономразвития России	637,97	-	-	115,9	77,5717 <14>	35,678 <30>	43,8858 <50>	175,4451	219,3064	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	296,5553	-	-	7,4	4,9523	2,2777	0,4447	217,0609	64,4197	
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	Строительство гостиничного комплекса категории 3 звезды на 60 номеров в г. Сегежа, Республика Карелия	всего	500	-	-	-	-	-	100	400	-	
		федеральный бюджет (субсидии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Минэкономразвития России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	500	-	-	-	-	-	100	400	-	
	Всего по направлению 3.1	11455,6641	0,9	9,6	1751,1154 <8>	1706,8229 <15>	2776,4429 <31>	2045,8166 <54>	2546,6252	2703,8297	
		федеральный бюджет (субсидии)	9705,4386	-	-	1646,7154 <8>	1604,1086 <15>	2609,3776 <31>	1547,0788 <51>	1787,2475	2596,3993	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	9705,4386	-	-	1646,7154 <8>	1604,1086 <15>	2609,3776 <31>	1547,0788 <51>	1787,2475	2596,3993	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	1250,2255	0,9	9,6	104,4	102,7143	167,0653 <35>	398,7378	359,3777	107,4304	
		внебюджетные источники	500	-	-	-	-	-	100	400	-	
	Направление 3.2 "Развитие энергетической инфраструктуры"	
	
39.	Строительство воздушной линии 330 кВ Ондская - Петрозаводск (2-я воздушная линия), 278 км	всего	926,9163	-	27,8	68,7	127,0832 <16>	203,3331	500	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	926,9163	-	27,8	68,7	127,0832 <16>	203,3331	500	-	-	
	Всего по направлению 3.2	926,9163	-	27,8	68,7	127,0832 <16>	203,3331	500	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	926,9163	-	27,8	68,7	127,0832 <16>	203,3331	500	-	-	
	Всего по задаче 3	12382,5804	19,6	537,5	4224,9154	2397,5061 <15>	2979,776 <31>	2545,8166 <51>	2546,6252	2703,8297	
		федеральный бюджет	9705,4386	-	-	1646,7154	1604,1086 <15>	2609,3776 <31>	1547,0788 <51>	1787,2475	2596,3993	
		в том числе:										
		субсидии	9705,4386	-	-	1646,7154	1604,1086 <15>	2609,3776 <31>	1547,0788 <51>	1787,2475	2596,3993	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	1250,2255	0,9	9,6	104,4000	102,7143	167,0653 <35>	398,7378	359,3777	107,4304	
		внебюджетные источники	1426,9163	-	27,8	68,7	127,0832 <16>	203,3331	600	400	-	
	Всего по Программе	91431,2919	14776,8	10213,7	21584,0154 <8>	12639,1607 <18>	7853,8361 <33>	11307,9862 <52>, <55>	9192,3752 <56>	6880,1097 <57>	
		федеральный бюджет	16207,0543	200	356,1	2984,7154 <8>	3275,2161 <18>	4087,7436 <33>	2572,9519 <52>, <55>	2562,4877 <56>	3184,5310 <57>	
		в том числе:										
		Минэкономразвития России	11923,6718	200	356,1	1922,4154 <8>	2423,915 <18>	3383,4874 <34>	1703,9879 <53>	1787,2475	2596,3993	
		Росавтодор	4283,3825	-	-	1062,3	851,3011 <5>	704,2562 <39>	868,9640 <54>	775,2402	588,1317	
		консолидированный бюджет Республики Карелия	1977,4399	13,2	44,3	190,2	210,1614	261,1594	572,2029	484,1375	202,0787	
		внебюджетные источники	73246,7977	14563,6	9813,3	18409,1	9153,7832	3504,9331	8162,8314	6145,75	3493,5	

--------------------------------
<1> С учетом средств федерального бюджета в объеме 12,7338 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р, и средств федерального бюджета в объеме 75,1585 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<2> В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,03 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<3> С учетом средств федерального бюджета в объеме 4,8839 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,0401 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<4> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,0024 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,0058 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией. В 2020 году указанный объект исключен из Программы в связи с отсутствием проектной документации.
<5> В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 1,6988 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<6> С учетом средств федерального бюджета в объеме 4,8863 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 1,7046 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<7> С учетом средств федерального бюджета в объеме 3,9248 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,0391 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<8> С учетом средств федерального бюджета в объеме 12,015 млн. рублей, перераспределенных в 2018 году в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
<9> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,8598 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<10> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1,6202 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,1044 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<11> С учетом средств федерального бюджета в объеме 155,6071 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<12> С учетом средств федерального бюджета в объеме 14,773 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,0143 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<13> С учетом средств федерального бюджета в объеме 3,9545 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,0168 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<14> С учетом средств федерального бюджета в объеме 3,6897 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,0423 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<15> С учетом средств федерального бюджета в объеме 184,4291 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,2927 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<16> Объемы средств из внебюджетных источников могут быть скорректированы в рамках инвестиционной программы публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
<18> С учетом средств федерального бюджета в объеме 202,0492 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р, и средств федерального бюджета в объеме 75,1585 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 1,9915 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<19> С учетом средств федерального бюджета в объеме 113,4797 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<20> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,262 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 0,6481 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 0,3146 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<21> С учетом средств федерального бюджета в объеме 255,8012 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году.
<22> С учетом средств федерального бюджета в объеме 256,0632 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, средств федерального бюджета в объеме 0,6481 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка, Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 10,8696 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<23> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,262 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, средств федерального бюджета в объеме 0,6481 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 0,3146 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<24> С учетом средств федерального бюджета в объеме 10,2951 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<25> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,6122 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<26> С учетом средств федерального бюджета в объеме 46,2357 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 28,7054 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<27> С учетом средств федерального бюджета в объеме 43,9305 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 100,5655 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 0,1477 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<28> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,5834 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 29,4117 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования. С учетом средств в объеме 268,4015 млн. рублей, которые выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 2138-р.
<29> С учетом средств федерального бюджета в объеме 81,9103 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 69,7812 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<30> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,2301 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 25,8727 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<31> С учетом средств федерального бюджета в объеме 183,7973 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 254,3365 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. С учетом средств в объеме в объеме 268,4015 млн. рублей, которые выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 2138-р. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 0,1477 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<32> Указанные средства федерального бюджета в объеме 69,0449 млн. рублей, предусмотренные в 2019 году на реализацию объекта, были возвращены в федеральный бюджет по итогам 2019 года в установленном порядке по причине отсутствия разработанной проектной документации. В 2020 году указанный объект исключен из Программы.
<33> С учетом средств федерального бюджета в объеме 297,9251 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 510,3997 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 11,0173 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<34> С учетом средств федерального бюджета в объеме 297,9251 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 254,5985 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. С учетом средств в объеме в объеме 268,4015 млн. рублей, которые выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 2138-р. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 0,4623 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<35> С учетом средств федерального бюджета в объеме 10,555 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<36> С учетом средств федерального бюджета в объеме 255,8012 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 10,555 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<37> С учетом средств федерального бюджета в объеме 55,6454 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<38> С учетом средств федерального бюджета в объеме 100,1694 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<39> С учетом средств федерального бюджета в объеме 52,3716 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<40> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1,0943 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<41> С учетом средств федерального бюджета в объеме 248,0829 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<42> С учетом средств федерального бюджета в объеме 401,7182 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<43> С учетом средств федерального бюджета в объеме 101,2637 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<44> С учетом средств федерального бюджета в объеме 300,4545 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<45> С учетом средств федерального бюджета в объеме 18,8064 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<46> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1034,0818 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<47> С учетом средств федерального бюджета в объеме 150,3045 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<48> С учетом средств федерального бюджета в объеме 197,0311 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<49> С учетом средств федерального бюджета в объеме 62,5297 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<50> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,0245 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<51> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1 462,7780 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<52> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1 920,1416 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<53> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1 619,6871 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<54> С учетом средств федерального бюджета в объеме 300,4545 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<55> Объем финансирования в размере 652,8103 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2021 году может быть уточнен в ходе исполнения Федерального закона от 8 декабря 2020 г. N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
<56> Объем финансирования в размере 2 562,4877 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2022 году может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
<57> Объем финансирования в размере 3 184,5310 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2023 году может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
БЕЛОМОРСКОГО, КЕМСКОГО, ЛОУХСКОГО, СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование территории	Значения показателей	
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
Доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы, процентов	
1.	Беломорский муниципальный район	15,6	15,8	9,3	25,2	-	-	-	-	
2.	Кемский муниципальный район	-	3,1	11,1	-	-	-	-	-	
3.	Сегежский муниципальный район	31,7	39,2	42,8	9,4	9,7	26,2	25,1	-	
4.	Костомукшский городской округ	26,8	19,6	9,3	13,7	0,8	26,5	32,6	43,6	
Количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений, единиц	
5.	Беломорский муниципальный район	-	-	-	-	2	-	-	-	
Количество реконструированных и приобретенных пожарных депо на территории Республики Карелия, единиц	
6.	Беломорский муниципальный район	-	-	-	1	-	-	-	-	
7.	Кемский муниципальный район	-	1	-	-	-	-	-	-	
Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, единиц	
8.	Лоухский муниципальный район	-	-	-	1	-	-	-	-	
Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры здравоохранения, единиц	
9.	Сегежский муниципальный район	-	-	-	-	-	-	1	-	
Количество реконструированных объектов в сфере культуры, единиц	
10.	Беломорский муниципальный район	-	-	-	-	1	-	-	-	
11.	Сегежский муниципальный район	-	-	-	-	-	1	-	-	
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры спорта, единиц	
12.	Сегежский муниципальный район	-	-	-	1	-	-	-	-	
13.	Костомукшский городской округ	-	-	-	-	1	-	-	-	

Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ БЕЛОМОРСКОГО,
КЕМСКОГО, ЛОУХСКОГО, СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(млн. рублей)

Наименование федеральной целевой программы, подпрограммы федеральной целевой программы, мероприятия (объекта капитального строительства)	Территория (приоритетная территория, субъект приоритетной территории)	Источники финансирования	Общий объем финансирования за весь период реализации федеральной целевой программы - всего	В том числе	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года"	Республика Карелия	всего, в том числе:	58281,0774	10945	7941,4	16101,3122	6330,2762 <1>	2199,3206 <7>	6207,5636 <15>	5659,1342	3180,036		
		федеральный бюджет	1326,5909	-	-	426,0319	271,8858 <1>	348,3190 <7>	210,1237 <15>	198,1169	155,079		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	287,2365	0,9	6	26,5803	17,3904	22,2016	38,4399	150,7673	24,957		
		внебюджетные источники	56667,25	10944,1	7935,4	15648,7	6041	1828,8	5959	5310,3	3000		
Мероприятие 1. Модернизация акционерного общества "Карельский окатыш" (г. Костомукша), 10,5 млн. тонн железорудных окатышей в год	Республика Карелия	всего, в том числе:	18749,3	3960	2000	2000	1725,5	63,8	3000	3000	3000	наращивание объемов производства железорудных окатышей в год	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		внебюджетные источники	18749,3	3960	2000	2000	1725,5	63,8	3000	3000	3000		
Мероприятие 4. Модернизация акционерного общества "Сегежский ЦБК"	Республика Карелия	всего, в том числе:	24644,55	4677,5	4000	9243,6	1189,2	765,0	2859	1910,3	-	наращивание объемов производства мешочной бумаги и мешков бумажных	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		внебюджетные источники	24644,55	4677,5	4000	9243,6	1189,2	765,0	2859,0	1910,3	-		
Мероприятие 13. Строительство Белопорожских гидроэлектростанций ГЭС-1 и ГЭС-2 Акционерного общества "Норд Гидро"	Республика Карелия	всего, в том числе:	10048,3	2306,6	1615,4	2000	3126,3	1000	-	-	-	сокращение энергодефицита в Республике Карелия за счет строительства экологически чистых источников энергии	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		внебюджетные источники	10048,3	2306,6	1615,4	2000	3126,3	1000	-	-	-		
Мероприятие 13.1. Строительство МГЭС "Белопорожская ГЭС-1" на реке Кемь установленной мощностью 24900 кВт	Республика Карелия	всего, в том числе:	5024,1	1153,3	807,7	1000	1563,1	500	-	-	-		
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		внебюджетные источники	5024,1	1153,3	807,7	1000	1563,1	500	-	-	-		
Мероприятие 13.2. Строительство МГЭС "Белопорожская ГЭС-2" на реке Кемь установленной мощностью 24900 кВт	Республика Карелия	всего, в том числе:	5024,2	1153,3	807,7	1000	1563,2	500	-	-	-		
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		внебюджетные источники	5024,2	1153,3	807,7	1000	1563,2	500	-	-	-		
Мероприятие 19. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Кеми (Торговый морской порт КЕМЬ), грузооборот первой очереди - 10 млн. тонн в год, второй очереди - 20 млн. тонн в год; численность работающих от 600 человек	Республика Карелия	всего, в том числе:	2725,1	-	320	2405,1	-	-	-	-	-	сокращение дефицита портовых услуг по перевалке отдельных видов грузов на северо-западе Российской Федерации, повышению эффективности доставки грузов с Урала, Сибири и северо-запада Российской Федерации в Северную и Западную Европу, а также в арабские страны	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		внебюджетные источники	2725,1	-	320	2405,1	-	-	-	-	-		
Мероприятие 22. Строительство капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия	Республика Карелия	всего, в том числе:	211,74	-	-	169,7	26,0	16,04	-	-	-	замена двух аварийных деревянных мостовых переходов путем строительства капитальных.	
		федеральный бюджет	199,11	-	-	159,6	24,4	15,11	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	12,63	-	-	10,1	1,6	0,93	-	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 22.1. Строительство мостового перехода через ручей на км 34+350 автомобильной дороги Сумпосад - Воренжа - Вирандозеро - Нюхча	Республика Карелия	всего, в том числе:	75,7			60,7	9,5	5,5	-	-	-		
		федеральный бюджет	71,2	-	-	57,1	8,9	5,2	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4,5	-	-	3,6	0,6	0,3	-	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 22.2. Строительство мостового перехода через р. Колежма на км 16+500 автомобильной дороги Сумпосад - Воренжа - Вирандозеро - Нюхча	Республика Карелия	всего, в том числе:	136,04	-	-	109	16,5	10,54	-	-	-		
		федеральный бюджет	127,91	-	-	102,5	15,5	9,91	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8,13	-	-	6,5	1	0,63	-	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 27. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Республики Карелия в 2021 - 2023 гг.	Республика Карелия	всего, в том числе:	580,036	-	-	-	-	-	170	230	180,036	реконструкция мостового перехода	
		федеральный бюджет	499,6302	-	-	-	-	-	146,4343	198,1169	155,079		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	80,4058	-	-	-	-	-	23,5657	31,8831	24,957		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 27.1. Реконструкция мостового перехода на км 9+950 автомобильной дороги "Кола", км 748 - Сегежа	Республика Карелия	всего, в том числе:	580,036	-	-	-	-	-	170 <20>	230 <21>	180,036 <22>		
		федеральный бюджет	499,6302	-	-	-	-	-	146,4343 <20>	198,1169 <21>	155,079 <22>		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	80,4058	-	-	-	-	-	23,5657	31,8831	24,957		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 30. Строительство, реконструкция и приобретение зданий пожарных депо, строительство здания для размещения пожарной техники с подсобными помещениями государственного казенного учреждения "Отряд противопожарной службы"	Республика Карелия	всего, в том числе:	64,3776	0,9	6	48,3154	9,9814 <2>	0,6528 <8>	-	-	-	улучшение материально-технической базы двух зданий пожарных депо, являющихся важной составляющей пожарно-спасательных сил Республики Карелия путем реконструкции и приобретения зданий	
		федеральный бюджет	54,6154			46,1154	9,3598 <2>	0,6122 <8>	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	9,7622	0,9	6	2,2	0,6216	0,0406	-	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 30.1. Реконструкция здания под размещение пожарного депо ГКУ "Отряд противопожарной службы по Беломорскому району", г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 2-б	Республика Карелия	всего, в том числе:	57,4776	-	-	48,3154	9,9814 <2>	0,6528 <8>	-	-	-		
		федеральный бюджет	54,6154	-	-	46,1154	9,3598 <2>	0,6122 <8>	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2,8622	-	-	2,2	0,6216	0,0406	-	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 30.2. Приобретение здания для размещения Пожарной части, пос. Кривой Порог Кемского района	Республика Карелия	всего, в том числе:	6,9	0,9	6	-	-	-	-	-	-		
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	6,9	0,9	6	-	-	-	-	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 31. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры здравоохранения, увеличение площади под размещение государственных объектов здравоохранения до 16,13 тыс. кв. м	Республика Карелия	всего, в том числе:	177,7299	-	-	57,7177	2,7385 <3>	0,1601 <9>	118,8842	-	-	повышение качества услуг в сфере здравоохранения путем модернизации инфраструктуры	
		федеральный бюджет	55,1531	-	-	54,2	2,5733 <3>	0,1504 <9>	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	122,5768	-	-	3,5177	0,1652	0,0097	118,8842	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 31.1. Реконструкция нежилых помещений, расположенных на 1-м и 2-м этажах здания N 7 по проезду Монтажников в г. Сегежа, под детскую поликлинику, 1 этап	Республика Карелия	всего, в том числе:	177,7299	-	-	57,7177	2,7385 <3>	0,1601 <9>	118,8842	-	-		
		федеральный бюджет	55,1531	-	-	54,2	2,5733 <3>	0,1504 <9>	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	122,5768	-	-	3,5177	0,1652	0,0097	118,8842	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 33. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	Республика Карелия	всего, в том числе:	183,6372	-	-	171,6	36,0822 <4>	9,8032 <10>	1,2338 <16>	-	-	повышение качества услуг в сфере водоотведения путем реконструкции канализационно-очистных сооружений	
		федеральный бюджет	170,5448	-	-	161,3	33,9522 <4>	9,2149 <10>	1,1597 <16>	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	13,0924	-	-	10,3	2,1300	0,5883	0,0741	-	-		
		внебюджетные источники	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 33.1. Реконструкция канализационно-очистных сооружений в пгт. Чупа Лоухского муниципального района Республики Карелия на 2016 год	Республика Карелия	всего, в том числе:	183,6372	-	-	171,6	36,0822 <4>	9,8032 <10>	1,2338 <16>	-	-		
		федеральный бюджет	170,5448	-	-	161,3	33,9522 <4>	9,2149 <10>	1,1597 <16>	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	13,0924	-	-	10,3	2,13	0,5883	0,0741	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 35. Реконструкция объектов инфраструктуры культуры	Республика Карелия	всего, в том числе:	348,1187	-	-	4,207	179,0926 <5>	306,1536 <11>	77,3 <17>	-	-	развитие инфраструктуры сферы культуры в районе путем реконструкции существующих зданий	
		федеральный бюджет	303,9457	-	-	3,9545	168,3422 <5>	287,7836 <11>	62,5297 <17>	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	44,1730	-	-	0,2525	10,7504	18,37	14,8001	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 35.1. Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Беломорск, ул. Банковская, 26, для создания музея Карельского фронта	Республика Карелия	всего, в том числе:	244,9928	-	-	-	134,92	191,9519 <12>	0,5198 <18>	-	-		
		федеральный бюджет	225,3445	-	-	-	126,82	180,4348 <12>	0,4866 <18>	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	19,6483	-	-	-	8,1	11,5171	0,0312	-	-		
		внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 35.2. Реконструкция административного здания МБУ "Сегежская централизованная библиотечная система"	Республика Карелия	всего, в том числе:	103,6145	-	-	4,207	44,1726 <5>	114,2017 <13>	76,8 <19>	-	-		
		федеральный бюджет	79,0898	-	-	3,9545	41,5222 <5>	107,3488 <13>	62,0411 <19>	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	24,5247	-	-	0,2525	2,6504	6,8529	14,7689	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 36. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры спорта	Республика Карелия	всего, в том числе:	47,6993	-	-	1,0721	35,3815 <6>	37,7109 <14>	-	-	-	развитие инфраструктуры сферы спорта в районе путем реконструкции существующего объекта	
		федеральный бюджет	43,103	-	-	0,862	33,2583 <6>	35,4479 <14>	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4,5963	-	-	0,2101	2,1232	2,263	-	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 36.1. Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, расположенного по ул. Лесокультурной в г. Сегеже Республики Карелия	Республика Карелия	всего, в том числе:	33,2082	-	-	0,6304	31,5186 <6>	27,5244 <14>	-	-	-		
		федеральный бюджет	29,6273	-	-	0,5925	29,6273 <6>	25,8727 <14>	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3,5809	-	-	0,0379	1,8913	1,6517	-	-	-		
		внебюджетные источники	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 36.2. Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия", г. Костомукша	Республика Карелия	всего, в том числе:	14,4911	-	-	0,4417	3,8629	10,1865	-	-	-		
		федеральный бюджет	13,4757	-	-	0,2695	3,6310	9,5752	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1,0154	-	-	0,1722	0,2319	0,6113	-	-	-		
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие 37. Строительство гостиничного комплекса категории 3 звезды на 60 номеров в г. Сегежа, Республика Карелия	Республика Карелия	Всего, в том числе:	500	-	-	-	-	-	100	400	-	удовлетворение спроса на размещение туристов в г. Сегежа	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		внебюджетные источники	500	-	-	-	-	-	100	400	-		

--------------------------------
<1> С учетом средств федерального бюджета в объеме 32,489 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<2> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,8598 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<3> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1,6202 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<4> С учетом средств федерального бюджета в объеме 25,4622 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<5> С учетом средств федерального бюджета в объеме 3,9545 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<6> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,5925 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<7> С учетом средств федерального бюджета в объеме 91,1329 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 95,6539 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 2138-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<8> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,6122 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<9> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,1504 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<10> С учетом средств федерального бюджета в объеме 8,4599 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 0,0001 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<11> С учетом средств федерального бюджета в объеме 81,9103 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 69,7812 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 2138-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<12> С учетом средств федерального бюджета в объеме 81,9103 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<13> С учетом средств федерального бюджета в объеме 69,7812 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 2138-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<14> С учетом средств федерального бюджета в объеме 25,8727 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 2138-р. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<15> С учетом средств федерального бюджета в объеме 63,6894 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<16> С учетом средств федерального бюджета в объеме 1,1597 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<17> С учетом средств федерального бюджета в объеме 62,5297 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<18> С учетом средств федерального бюджета в объеме 0,4886 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<19> С учетом средств федерального бюджета в объеме 62,0411 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<20> Объем финансирования в размере 146,4343 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2021 году может быть уточнен в ходе исполнения Федерального закона от 8 декабря 2020 г. N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
<21> Объем финансирования в размере 198,1169 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2022 году может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
<22> Объем финансирования в размере 155,079 млн. рублей за счет средств федерального бюджета в 2023 году может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА"

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" (далее соответственно - Программа, субсидия).
2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств Республики Карелия по реализации мероприятий Программы в рамках следующих направлений:
а) развитие транспортного комплекса и дорожного строительства;
б) строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства и социальной сферы;
в) работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
3. Субсидия предоставляется бюджету Республики Карелия в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью федерального бюджета, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя средств федерального бюджета, на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, при условии предоставления Республикой Карелия гарантий обеспечения полного и своевременного финансирования мероприятий Программы, реализация которых осуществляется полностью или частично за счет внебюджетных источников.
4. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества определяется в соответствии с пунктами 6 и 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличие правовых актов Республики Карелия, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
б) наличие в бюджете Республики Карелия (сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии и порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
в) заключение соглашения о предоставлении субсидии, которое должно содержать положения, предусмотренные пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий (далее - соглашение).
6. Включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются субсидии, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества не допускается в случае уменьшения объемов финансирования расходов на мероприятия по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена.
7. Неотъемлемой частью соглашения является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства государственной собственности Республики Карелия, определенный в соответствии с пунктом 11 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.
Главный распорядитель средств федерального бюджета вправе заключать соглашения на 3-летний срок при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных соответствующему главному распорядителю средств федерального бюджета, на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений показателей (индикаторов) федеральной целевой программы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
9. Объем бюджетных ассигнований Республики Карелия на финансирование расходного обязательства Республики Карелия, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия (определяется сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
10. Перечисление субсидии осуществляется на единый счет бюджета Республики Карелия, открытый финансовому органу Республики Карелия в территориальном органе Федерального казначейства.
11. Оценка эффективности использования субсидии Республикой Карелия осуществляется главным распорядителем средств федерального бюджета по итогам финансового года исходя из фактического достижения значений результатов использования субсидии (в процентах) и предусмотренных соглашениями значений следующих результатов использования субсидии по мероприятиям:
а) инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия - количество созданных промышленных площадок;
б) реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия - количество реконструированных объектов опорной сети автостанций Республики Карелия;
в) строительство капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия (7 шт./180,3 пог. м) - количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений;
г) строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта Петрозаводск (Бесовец) - количество построенных зданий аэровокзальных комплексов;
д) строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Республики Карелия (8,012 км/22,1 пог. м):
протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Карелия;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия;
количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений;
е) строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Республики Карелия в 2021 - 2023 годах (9,315 км, в том числе 514,88 пог. м):
протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Карелия;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия;
количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений;
ж) строительство автодороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, км 106 - Больничный, 6,5 км:
протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Карелия;
доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия;
з) обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей, - количество семей, имеющих 3 и более детей, которым предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках Программы;
и) строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения - количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
к) реконструкция и приобретение зданий пожарных депо государственного казенного учреждения "Отряд противопожарной службы" - количество реконструированных и приобретенных пожарных депо на территории Республики Карелия;
л) строительство и реконструкция объектов инфраструктуры здравоохранения - количество построенных и реконструированных объектов в сфере здравоохранения;
м) реконструкция здания стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи", этап "Строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации" - созданная площадь под размещение государственных объектов здравоохранения;
н) строительство объектов инфраструктуры образования - количество мест, созданных в дошкольных образовательных организациях;
о) реконструкция объектов инфраструктуры культуры - количество реконструированных и построенных объектов в сфере культуры, в том числе с целью приспособления к современному использованию;
п) строительство и реконструкция объектов инфраструктуры спорта - количество построенных и реконструированных объектов инфраструктуры физической культуры и спорта.
12. Порядок и условия возврата средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, а также основания для освобождения Республики Карелия от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 16 - 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
13. Контроль за соблюдением Республикой Карелия условий предоставления субсидии осуществляется главным распорядителем средств федерального бюджета и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ НА 2022 - 2023 ГОДЫ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА"

Наименование мероприятия	Мощность (тыс. кв. м)	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)	Срок реализации	Предельные объемы финансирования (млн. рублей)	
				всего	в том числе	
					за счет средств федерального бюджета	за счет иных источников	
Всего по Программе	
Минэкономразвития России	
Всего	14	3660 <1>	2022 - 2023 годы	3660	3623,4	36,6	
			в том числе:				
			2022 год	1464	1449,36	14,64	
			2023 год	2196	2174,04	21,96	
Реконструкция здания стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи", этап "Строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации"	14	3660 <1>	2022 - 2023 годы	3660	3623,4	36,6	
			в том числе:				
			2022 год	1464	1449,36	14,64	
			2023 год	2196	2174,04	21,96	

--------------------------------
<1> Без учета средств в объеме 53 млн. рублей, затраченных на проектные и изыскательские работы, за счет средств бюджета Республики Карелия в 2021 - 2022 годах, в том числе в 2020 году - 14,92 млн. рублей, в 2021 году - 38,08 млн. рублей.

Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

МЕТОДИКА
ДЕТАЛИЗАЦИИ УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА"

1. Настоящая методика разработана для определения общих и специальных требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" (далее соответственно - Программа, проекты Программы), и предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных объектов капитального строительства в составе Программы.
2. Детализация проектов Программы и планирование очередности строительства объектов капитального строительства осуществляются с учетом степени их влияния на социально-экономическое развитие Республики Карелия исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей Программы.
3. Государственный заказчик Программы проводит интегральную оценку проектов Программы на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке и сроки, которые предусмотрены Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
4. Государственным заказчиком Программы при проведении детализации проектов Программы по каждому объекту капитального строительства проверяется наличие следующих документов:
а) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;
б) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);
в) документ об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) титульные списки вновь начинаемых объектов капитального строительства в очередном финансовом году и плановом периоде и титульные списки переходящих объектов капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные государственным заказчиком Программы (заказчиком Программы);
д) положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;
е) задание на проектирование (в случае, если на разработку проектной документации предоставляются средства федерального бюджета);
ж) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, предусмотренном Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
5. Государственный заказчик Программы проводит детализацию укрупненных инвестиционных проектов путем определения конкретных объектов капитального строительства.
Перечень объектов капитального строительства предусматривается соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на реализацию Программы, за исключением объектов капитального строительства, предусмотренных пунктом 4 приложения N 7 к Программе.

Приложение N 10
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД
ДО 2023 ГОДА"

1. Степень достижения ожидаемых результатов реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" (далее - Программа) планируется определять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому показателю, приведенному в приложении N 1 к Программе.
2. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы (Ei) определяется по формуле:

где:
Ti - фактическое значение i-го индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
Tni - нормативное значение i-го индикатора, утвержденное Программой.
3. Оценка эффективности реализации Программы (Ep) (процентов) определяется по формуле:

где m - количество показателей, приведенных в приложении N 1 к Программе.

Приложение N 11
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА"

1. Целевые показатели и индикаторы федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную, а также ежеквартальную оценку реализации Программы в целях принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке Программы.
2. Целевые индикаторы и показатели Программы, характеризующие достижение целей и решение поставленных задач Программы, определяются по данным официального статистического учета, за исключением индикаторов и показателей, расчет которых осуществляется по данным ведомственной статистики.
3. Показатель, характеризующий прирост инвестиций в основной капитал в 2023 году по отношению к 2015 году в сопоставимых ценах () (процентов), определяется на основании статистических показателей по формуле:

где Tp - темп роста инвестиций в основной капитал в 2023 году по отношению к 2015 году в сопоставимых ценах (процентов), который определяется по формуле:

Tp = (Tp16 x Tp17 x Tp18 x Tp19 x Tp20 x Tp21 x Tp22 x
Tp23) x 100,

где:
Tp16 - темп роста инвестиций в основной капитал в 2016 году по отношению к 2015 году в сопоставимых ценах;
Tp17 - темп роста инвестиций в основной капитал в 2017 году по отношению к 2016 году в сопоставимых ценах;
Tp18 - темп роста инвестиций в основной капитал в 2018 году по отношению к 2017 году в сопоставимых ценах;
Tp19 - темп роста инвестиций в основной капитал в 2019 году по отношению к 2018 году в сопоставимых ценах;
Tp20 - темп роста инвестиций в основной капитал в 2020 году по отношению к 2019 году в сопоставимых ценах;
Tp21 - темп роста инвестиций в основной капитал в 2021 году по отношению к 2020 году в сопоставимых ценах;
Tp22 - темп роста инвестиций в основной капитал в 2022 году по отношению к 2021 году в сопоставимых ценах;
Tp23 - темп роста инвестиций в основной капитал в 2023 году по отношению к 2022 году в сопоставимых ценах.
4. Показатель, касающийся числа созданных рабочих мест (тыс. единиц), формирующийся на основании данных, представляемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Карелия (p), определяется по формуле:

где:
18 - количество муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия;
рнi - количество созданных новых рабочих мест в i-м муниципальном образовании (тыс. единиц);
рмi - количество модернизированных рабочих мест в i-м муниципальном образовании (тыс. единиц).
Указанный показатель (p) рассчитывается Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия.
5. Показатель, касающийся протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия (L) (км), определяется по формуле:

где:
6 - период реализации Программы (2016 - 2023 годы);
Li - протяженность автомобильных дорог общего пользования, запланированных к вводу в эксплуатацию в i-м году, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по результатам строительства и реконструкции. Источником таких данных является ведомственная статистика.
Указанный показатель (L) рассчитывается Федеральным дорожным агентством по информации, представляемой органами исполнительной власти Республики Карелия.
6. Показатель, касающийся количества построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений (N) (единиц), определяется по формуле:

где Ni - количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений, запланированных к вводу в эксплуатацию в i-м году.
Источником таких данных является ведомственная статистика.
Указанный показатель (N) рассчитывается Федеральным дорожным агентством по информации, представляемой органами исполнительной власти Республики Карелия.
7. Показатель, касающийся количества созданных промышленных площадок (N1) (единиц), определяется по формуле:

где N1i - количество созданных промышленных площадок, запланированных к вводу в эксплуатацию в i-м году. Источником таких данных является ведомственная статистика.
8. Показатель, касающийся количества реконструированных объектов опорной сети автостанций Республики Карелия (N2) (единиц), определяется по формуле:

где N2i - количество реконструированных объектов опорной сети автостанций Республики Карелия, запланированных к вводу в эксплуатацию в i-м году. Источником таких данных является ведомственная статистика.
9. Показатель, касающийся количества реконструированных и приобретенных пожарных депо на территории Республики Карелия (N3) (единиц), определяется по формуле:

где N3i - количество реконструированных и приобретенных пожарных депо на территории Республики Карелия, запланированных к вводу в эксплуатацию в i-м году. Источником таких данных является ведомственная статистика.
10. Показатель, касающийся количества построенных и реконструированных объектов в сфере здравоохранения (N4) (единиц), определяется по формуле:

где N4i - количество реконструированных объектов в сфере здравоохранения, запланированных к вводу в эксплуатацию в i-м году. Источником таких данных является ведомственная статистика.
11. Показатель, касающийся количества построенных и реконструированных объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения (N5) (единиц), определяется по формуле:

где N5i - количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, запланированных к вводу в эксплуатацию в i-м году. Источником таких данных является ведомственная статистика.
12. Показатель, касающийся количества мест, созданных в дошкольных образовательных организациях (N6) (единиц), определяется по формуле:

где N6i - количество мест, созданных в дошкольных образовательных организациях, запланированных к предоставлению в i-м году. Источником таких данных является ведомственная статистика.
13. Показатель, касающийся количества реконструированных объектов в сфере культуры, в том числе приспособленных к современному использованию (N7) (единиц), определяется по формуле:

где N7i - количество реконструированных объектов в сфере культуры, запланированных к вводу в эксплуатацию в i-м году. Источником таких данных является ведомственная статистика.
14. Показатель, касающийся количества построенных и реконструированных объектов инфраструктуры физической культуры и спорта (N8) (единиц), определяется по формуле:

где N8i - количество построенных и реконструированных объектов инфраструктуры физической культуры и спорта, запланированных к вводу в эксплуатацию в i-м году. Источником таких данных является ведомственная статистика.
15. Показатель, касающийся количества семей, имеющих 3 и более детей, которым предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках Программы, определяется на основании информации, представляемой органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Карелия (K), по формуле:

где Ki - количество семей, имеющих 3 и более детей, которым предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках Программы в i-м году.
Указанный показатель (K) рассчитывается Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
16. Показатель, касающийся доли средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы (Di), определяется по формуле:

Di = Vвнеб.i / Vоб.i x 100%,

где:
Vвнеб.i - объем привлеченных средств за счет внебюджетных источников в i-м году;
Vоб.i - общий объем финансирования Программы.
Указанный показатель (Di) рассчитывается Министерством экономического развития Российской Федерации как доля фактически привлеченных средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы на основании отчетов о реализации мероприятий Программы, представляемых Правительством Республики Карелия.
17. Показатель, касающийся количества построенных зданий аэровокзальных комплексов (N9) (единиц), определяется по формуле:

где N9i - количество построенных зданий аэровокзальных комплексов, запланированных к вводу в эксплуатацию в i-м году. Источником таких данных является ведомственная статистика.

Приложение N 12
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2023 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД
ДО 2023 ГОДА"

1. Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия", утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 г. N 49-П.
2. Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования", утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 г. N 196-П.
3. Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы", утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 г. N 197-П.
4. Государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 г. N 228-П.
5. Государственная программа Республики Карелия "Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений", утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 5 августа 2014 г. N 240-П.
6. Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 г. N 278-П.
7. Государственная программа Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия" на 2015 - 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 г. N 341-П.
8. Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами", утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 г. N 351-П.
9. Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 г. N 118-П.".